사 업 명
국회 통합디지털센터 건립 (2033-302)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	국회	관리국		010	011
명칭	일반·지방행정	입법및선거관리
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2000	2033	302
명칭	국회사무처운영	국회청사확보및시설관리	국회 통합디지털센터 건립
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○			○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
국회 통합디지털센터 건립	소관부처	실·국·과(팀)
관리국
시설과
사업시행주체

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
국회 통합디지털센터 건립	32	3,920	3,920	11,994	2,026	△1,894	△48.3

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액
○ 기능별 분류(합계)	2,613	2,613	32	1,601	980	3,920	5,521	4,877	-	644	2,026
․국회통합디지털센터 건립	2,613	2,613	32	1,601	980	3,920	5,521	4,877	-	644	2,026
○ 비목별 분류(합계)	2,613	2,613	32	1,601	980	3,920	5,521	4,877	-	644	2,026
․건설보상비(410-00)	-	-	-	-	-	3,500	3,500	3,500	-	-	-
․기본조사설계비(420-01)	-	930	23	717	190	-	732	726	-	6	43
․실시설계비(420-02)	2,613	1,659	-	884	775	6	884	421	-	463	468
․공사비(420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,397
․감리비(420-04)	-	-	-	-	-	414	405	230	-	175	113
․시설부대비(420-05)	-	24	9	-	15	-	-	-	-	-	5
○ 기능·비목별 분류(합계)	2,613	2,613	32	1,601	980	3,920	5,521	4,877	-	644	2,026
․국회통합디지털센터 건립	2,613	2,613	32	1,601	980	3,920	5,521	4,877	-	644	2,026
․건설보상비(410-00)	-	-	-	-	-	3,500	3,500	3,500	-	-	-
․기본조사설계비(420-01)	-	930	23	717	190	-	732	726	-	6	43
․실시설계비(420-02)	2,613	1,659	-	884	775	6	884	421	-	463	468
․공사비(420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,397
․감리비(420-04)	-	-	-	-	-	414	405	230	-	175	113
․시설부대비(420-05)	-	24	9	-	15	-	-	-	-	-	5

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (국회 통합디지털센터 건립) 화재‧정전 등으로 인한 정보자원 유실 방지 및 중요 의정자료 보호 강화를 위한 국회 정보자원 관리센터이자 국민에게 다가가는 국회 이미지 강화를 위한 디지털 체험‧전시관 등을 포함한 도심형 복합 디지털센터 건립 추진

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거

- ｢국회법｣ 제21조(국회사무처)

- ｢국회법｣ 제23조(국회의 예산)

- ｢국회사무처법｣ 제2조(직무)

- ｢국회사무처 직제｣ 제11조(관리국)

- ｢국회사무처 직제 시행규칙｣ 제13조(관리국에 두는 과)

② 추진경위

- 2021. 01. ∼ 05.	국회 통합디지털센터 건립 타당성조사 및 기본계획수립 용역

- 2021. 06.	입찰방법 심의
(설계·시공 일괄입찰, 국토부 중앙건설기술심의위원회)

- 2021. 06. ∼ 08.	입찰안내서 작성 용역

- 2021. 08. ∼ 09.	입찰안내서 보완 및 심의

- 2021. 10. ∼ 2022. 01.	입찰공고

- 2022. 01. ∼ 05.	기본설계 및 우선시공분 공사 실시설계

- 2022. 05.	설계평가회

- 2022. 06. ∼ 08.	우선시공분 공사 가격협상(결과 : 결렬)

- 2022. 08.	입찰방법 변경 심의
(설계·시공 일괄입찰→설계·시공 분리입찰)

- 2022. 09. ∼ 10.	타당성재조사 심의자료 제출 및 총사업비 조정 요청
(국회사무처→기획재정부)

- 2022. 10.	타당성재조사 시행 요청(기획재정부→한국개발연구원)

- 2022. 10. ∼ 2024. 01.	타당성재조사 완료

- 2024. 01. ∼ 2024. 09. 총사업비 협의 완료

- 2024. 10. ∼ 2024. 12. 공공건축 심의 및 설계공모를 통한 설계업체 선정

- 2025. 01. ∼	기본 및 실시설계

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 505억 5,300만원

- 사업기간 : 2021년 ∼ 2027년

- 최근 5년 간 투입된 사업비

(단위: 백만원)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	(11,360)	(3,022)	(2,613)	3,920	2,026

※ 괄호 안의 사업비는 타당성재조사 이전 총사업비의 연도별 예산액

- 기타 : 연면적 8,609㎡(2,604평), 지하1층/지상4층

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국회사무처

- 사업 수혜자: 해당없음

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거: 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

(1) 국회 통합디지털센터 건립

ㅇ예산증감내역: (‘25)3,920백만원→(’26)2,026백만원(1,894백만원 감)

ㅇ산출근거

- 건설보상비(410-00): (‘25)3,500백만원→(‘26) - (순감)

- 기본조사설계비(420-01): (‘25) - →(‘26)43백만원(순증)

- 실시설계비(420-02): (‘25)6백만원→(‘26)468백만원(462백만원 증)

- 공사비(420-03): (‘25) - →(‘26)1,397백만원(순증)

- 감리비(420-04): (‘25)414백만원→(‘26)113백만원(301백만원 감)

- 시설부대비(420-05): (‘25) - →(‘26)5백만원(순증)

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도: 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	- 2022. 01. ∼ 05. : 기본설계 및 우선시공분 공사 실시설계 - 2022. 05. : 설계평가회 - 2022. 06. ∼ 08. : 우신시공분 공사 가격협상(결과 : 결렬) - 2022. 08. : 입찰방법 변경 심의(설계·시공 일괄입찰→설계·시공 분리입찰) - 2022. 09. ∼ 10. : 타당성재조사 심의자료 제출 및 총사업비 조정 요청 - 2022. 10. : 타당성재조사 시행 요청(기획재정부→한국개발연구원)
2023	- 2022. 10. ∼ 2024. 01. : 타당성재조사 시행·완료
2024	- 2024. 01. ∼ 2024. 09. : 총사업비 협의 완료 - 2024. 10. ∼ 2024. 12. : 공공건축심의 및 설계공모를 통한 설계업체 선정
2025	- 2025. 01. ∼ : 기본·실시설계 실시 중

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 위기상황 발생 시 안전설비 도입을 통해 증가하는 정보자원 보안관리의 안정성 및 효율성 제고

- 정보자원의 관리를 통해 안정적인 추진기반 마련

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지

□  국회 통합디지털센터 건립 타당성조사 및 기본계획수립 용역
((주)희림종합건축사사무소, ’21. 01. ~ ’21. 05.)

- 국회 중요 자료 유실 사태를 방지하고 정보자원 및 보안관제 이용을 통한 효율성 및 정보 보안제고를 위해서 국회 통합디지털센터 건립 필요

- 규모: 연면적 11,934㎡(3,613평)

- 총사업비: 468억 8,600만원,

- B/C: 1.05

□ 국회 통합디지털센터 건립 타당성재조사

(한국개발연구원 ’22. 10. ~ ’24. 01.)

- 사업추진 과정에서 총사업비의 규모가 예비타당성조사의 대상 규모로 증가한 사업으로 「국가재정법」제38조에 따라 타당성재조사 실시
(당초 : 467억 7,900만원 → 조정요구 : 726억 5,500만원)

- 규모 : 연면적 9,556㎡(2,891평)

- 총사업비 : 639억 7,400만원(전산센터 이전비용포함)

- B/C : 1.36,  AHP : 0.61

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역

□ 총사업비 정보

(단위: 억원)

연도	사업기간	2022까지 기투자액	2023	2024	2025	2026	2027이후 투자계획	계
사업비	2021~2027	(135.36)*	(30.22)*	17.36	39.20	20.26	428.71	505.53

* 타당성재조사 결과에 따른 총사업비 협의(‘24. 9.) 이전 예산액(실집행 사업비 8.01억원)

□ 총사업비 변경내역(변경일자 및 규모, 변경사유)

(단위: 억원)

구분	변경연도	총사업비		사업기간		변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최초	2021	468.86		2021	2024
(1)차 변경	2021	468.86	467.84	2021	2024	낙찰차액 감액
(2)차 변경	2021	467.84	467.79	2021	2024	집행잔액 감액
(3)차 변경	2024	467.79	505.53	2021	2027	타당성재조사 결과에 따른 총사업비 협의

7) 사업 집행절차

예산집행 등 기본적인 사항은 ｢국회사무처위임전결규정｣에 의한 내부결재 등에
의해 집행

8) 각종 평가

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적

- 타당성 재조사와 총사업비 변경 협의 지연으로 2024년 말 설계용역이 발주된 점을 감안하여 추가적인 사업 지연이 발생하지 않도록 관리를 강화할 필요(2024회계연도 결산, 예정처)

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산 현액(A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	11,360	-	11,360	13,481	747	5.5	-	12,734
2023	3,022	-	3,022	3,022	-	-	-	3,022
2024	2,613	-	2,613	2,613	32	1.22	1,601	980
2025	3,920	-	3,920	5,521	4,877	88.3	-	644

□ 2025년 이․전용 등 세부내역: 해당없음