사 업 명
기상청 국가기상센터 신축 (7141-301)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	혁신도시건설 특별회계	기상청	운영지원과		150	153
명칭	과학기술	과학기술일반
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	7100	7141	301
명칭	기상행정지원	기상청 이전	기상청 국가기상센터 신축
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○			○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 담당자
사업명	구분
기상청 국가기상센터 신축	소관부처	운영지원과 시설관리팀
사업시행주체	기상청

가. 예산안 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
기상청 국가기상센터 신축	2,071	1,363	-	12,254	1,363	0	0

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산안 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산안
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월액	불용액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	1,943	2,124	2,071	53	0	1,363	1,416	1,041	1,363	988	373	2	1,363
․기상청 국가기상센터 신축사업	1,943	2,124	2,071	53	0	1,363	1,416	1,041	1,363	988	373	2	1,363
○ 비목별 분류(합계)	1,943	2,124	2,071	53	0	1,.363	1,416	1,041	1,363	988	373	2	1,363
․기본설계비(420-01)	1,943	2,124	2,071	53	0	-	53	53	-	-	-	-	-
․실시설계비(420-02)	-	-	-	-	-	1,313	1,313	938	1,313	938	373	2	-
․공사비(420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,282
․감리비(420-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
․시설부대비(420-05)	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-
○ 기능·비목별 분류(합계)	1,943	2,124	2,071	53	0	1,363	1,416	1,041	1,363	988	373	2	1,363
․기상청 국가기상센터 신축사업	1,943	2,124	2,071	53	0	1,.363	1,416	1,041	1,363	988	373	2	1,363
-기본설계비(420-01)	1,943	2,124	2,071	53	0	-	53	53	-	-	-	-	-
-실시설계비(420-02)	-	-	-	-	-	1,313	1,313	938	1,313	938	373	2	-
-공사비(420-03)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,282
-감리비(420-04)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81
-시설부대비(420-05)	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	-	-	-

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

(기상청 국가기상센터 신축)

- 기상청 본청 대전이전 결정(국무회의 `21.02.09.)에 따라 추진되는 중앙관서 공공청사 신축사업으로 혁신도시건설특별회계 예산이 지원되는 사업

- 본청 대전이전 시 종합상황실 신축의 필요성으로 2단계로 이전이 추진되며, 기상업무처리 효율성을 고려 최대한 본청이 분리운영되는 기간 최소화 필요

* `22년 2월까지 기상예보 연계성이 떨어지는 정책부서의 1차 이전(346명), `28년 12월 기상센터 신축 완료 후 2차 이전(320명) 이전 예정

- 정부 2050 탄소중립 비전 선언(대통령 `20.12.)에 부합한 선도적인 탄소중립 정부청사 구축사업

* 국내 최초 탄소중립청사 신축을 통한 지역 건축관광 및 교육자원, 관련설비산업에 파급, 국가전력망 수요 축소, 특수시설 운영관리 전문인력 직접고용, 가치를 배가하는 중앙부처의 지방이전 등 순기능 유발

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시

- 혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법 제29조(공공기관의 지방이전)

- 기상법 제4조(국가의 책무)

- 2050 탄소중립위원회 「탄소중립 기상청사 건립」과제 포함(`21.4.)

- 지진재해대책법 제15조 및 제16조 (공공시설물 내진보강)

- 재난 및 안전관리 기본법 제4조(국가 등의 책무)

- 공공부문 온실가스 및 에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침 제9조(목표관리)

- 기상법 제34조(기상현상 및 기후변화에 관한 지식보급)

② 추진경위

- 기상청 대전이전 결정(국무회의 `21.2.9.)

- 국회 환노위 정책질의(국가기상센터를 탄소중립 NET-ZERO 빌딩으로 신축)]

- 미래가치 창출 탄소제로 국가기상센터 신축방안 컨설팅 용역(`21.5.~7.)

- `22년 기상청 청사수급관리계획 반영(`21.6.2. 행정안전부)

- `22년도 국가기상센터 신축사업 정부예산 반영(`21.7. 혁신회계)

- 국가기상센터 신축사업 건축기획용역 착수(`21.8.)

- 국가기상센터 신축사업 예비타당성면제사업 선정(`21.8.24./제5차 재정사업평가위원회)

- 기상청 정부대전청사 이전 공공기관으로 지정(`21.10.27./ 국토부)

- KDI 사업계획적정성 검토 착수(`21.11.)

- 정부대전청사 내 국가기상센터 건립부지 확정(`22.7./ 행정안전부)

- 국가기상센터 신축사업 건축기획용역 완료(`22.12.)

- KDI 사업계획적정성 검토 완료(`23.5. 기획재정부 재정사업성과심의회)

- 총사업비 심의 확정(`23.8./ 기획재정부)

- 총사업비 조정 완료(`23.9./ 기획재정부)

- 국가기상센터 국제설계공모 관리용역 착수(`23.11.)

- 국제설계공모 완료(`24.4.)

- 국가기상센터 신축사업 설계용역 계약(`24.5.)

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 45,436백만원

- 사업기간 : `22년 ~ `28년

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026(안)
사업비	945	3,044	1,943	1,363	1,363

- 기타 : 부지면적 9,000㎡내외 , 건축연면적 8,127㎡, 지하 1층~ 지상 3층 규모

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 기상청

- 사업 수혜자 : 대국민

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산안 산출 근거

ㅇ 총요구액 : 1,363백만원

① 국가기상센터 신축사업 설계비

: (‘25) 1,363백만원 → (’26) 1,363백만원 (전년 동)

- (요구) 공사비 등 1,363백만원

- (산출) 공사비(1년차) 1,282백만원(총 공사비 36,603백만원의 3.5%)

감리비(1년차) 81백만원(총 감리비 2,310백만원의 3.5%)

ㅇ 2025년도 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
1,363	○ 실시설계비(420-02) : 1,313,000천원 가. 실시설계비 전액 1,313,000천원 ○ 시설부대비(420-05) : 50,000천원 가. 시설부대비(조달수수료 등) 50,000천원	1,363	○ 공사비(420-03) : 1,282,000천원 가. 공사비 1년차 소요 1,282,000천원 ○ 감리비(420-04) : 81,000천원 가. 감리비 1년차 소요 81,000천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022
2023	- KDI 사업계획적정성 검토 완료(5월), 총사업비 심의 완료(9월)
2024	- 국제지명설계공모 완료(4월) - 계획설계 완료(9월) 및 중간설계 완료(12월)
2025	- 조달청 설계적정성 검토 완료(7월)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 :

- 국가기관 지방이전에 따른 국가균형발전

- 탄소중립 청사개발에 따른 운영예산 절약 및 연간 온실가스 감축

- 국내 최초 100% 에너지 자립형 건축물 신축을 통한 선도사례 개발, 신산업 창출의 장 마련으로 차별화된 공공역할 수행

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 예비타당성 조사 면제

※ 사업계획적정성 검토 대상(’21.11.월∼`23.5.)

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역

- 총사업비 관리 대상 사업인 경우 작성

□ 총사업비 정보

(단위: 억원)

연도	사업기간	2022까지 기투자액	2023	2024	2025	2026	2027이후 투자계획	계
사업비	`22~`28	-	181	1,943	1,363	1,363	41,949	45,436

□ 총사업비 변경내역(변경일자 및 규모, 변경사유)

(단위: 억원)

구분	변경연도	총사업비		사업기간		변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최초	2022	67,515		2022	2026
(1)차 변경	23		45,436	2022	2027	사업계획적정성 검토 총사업비 심의 결과(기재부) 반영(`23년 8월)
(2)차 변경	23		45,436	2022	2028	총사업비 확정 및 조정(`23년 9월)
2026년도 요구		1,363		2022	2028

7) 사업 집행절차

	사업 계획 수립			설계 용역 시행			인‧허가 협의			공사 발주			공사 착공			시공 (사업 시행)			완공 (사업 완료)

8) 각종 평가: 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	945	-	945	-	-	-	945	-	-	-	-	945
2023	3,044	-	3,044	-	-	-	3,044	-	-	-	181	2,863
2024	1,943	-	1,943	181	-	-	2,124	2,071	106.5	97.5	53	0
2025	1,363	-	1,363	53	-	-	1,416	1,041	76.4	73.5	373	2

□ 출연·보조사업 등 실집행내역 : 해당없음

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- (불용) KDI 사업계획적정성 검토 장기소요(`21.11. ~ `23.5.)따른 사업 미발주
2023	- (불용) KDI 사업계획적정성 검토 장기소요(`21.11. ~ `23.5.)로 기재부 총사업비 확정(`23.8.) 및 조정(`23.9.)이 늦어짐에 따라 국제설계공모 관리용역 등 일부 계약(181백만원) 건을 제외한 예산액 불용(2,963백만원)
2024	- 해당없음
2025	-

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음

라. 기타 추가자료: 해당없음