사 업 명
(60) 공기액화기반에너지저장및활용시스템기술개발(R&D)(6431-408)
□ 사업 코드 정보
구분	기금	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	기후대응기금	기후에너지환경부	기후에너지정책관 기후에너지재정과		120	126
명칭	교통및물류	물류등기타
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	6400	6431	408
명칭	탄소중립기반구축	기술개발	공기액화기반에너지저장및 활용시스템기술개발(R&D)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
		○				기획재정부
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○
□ 사업 담당자
사업명	구분
공기액화 기반에너지 저장및활용 시스템기술 개발(R&D	소관부처	건설정책국 기술안전정책관
기술정책과
사업시행주체	국토교통과학 기술진흥원

가. 지출계획 총괄표

(단위: 백만원, %)

목명	2024년 결산	2025년 계획		2026년		증감 (B-A)
		당초(A)	수정	정부안	확정(B)		(B-A)/A
공기액화기반 에너지저장및활용시스템기술개발(R&D)	4,623	5,200	5,200	8,233	8,233	3,033	58.3

□ 기능별(내역사업별), 목별 계획 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025								2026 계획
	계획액 (수정)	계획 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	계획액		계획 현액	집행액 [실집행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
						당초	수정			계획 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	4,623	4,623	4,623 [4,623]	-	-	5,200	5,200	5,200	5,200 [5,200]	5,200	5,200 [5,200]	-	-	8,233
․공기액화기반에너지저장및활용시스템기술개발	4,623	4,623	4,623 [4,623]	-	-	5,200	5,200	5,200	5,200 [5,200]	5,200	5,200 [5,200]	-	-	8,233
○ 비목별 분류(합계)	4,623	4,623	4,623 [4,623]	-	-	5,200	5,200	5,200	5,200 [5,200]	5,200	5,200 [5,200]	-	-	8,233
․연구개발활동비등(360-05)	4,623	4,623	4,623 [4,623]	-	-	5,200	5,200	5,200	5,200 [5,200]	5,200	5,200 [5,200]	-	-	8,233
○ 기능·비목별 분류(합계)	4,623	4,623	4,623 [4,623]	-	-	5,200	5,200	5,200	5,200 [5,200]	5,200	5,200 [5,200]	-	-	8,233
․공기액화기반에너지저장및활용시스템기술개발	4,623	4,623	4,623 [4,623]	-	-	5,200	5,200	5,200	5,200 [5,200]	5,200	5,200 [5,200]	-	-	8,233
․연구개발활동비등(360-05)	4,623	4,623	4,623 [4,623]	-	-	5,200	5,200	5,200	5,200 [5,200]	5,200	5,200 [5,200]	-	-	8,233

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (공기액화기반에너지저장및활용시스템기술개발(R&D)) 정부의 2050 탄소중립 사회 실현과 국토부 제로에너지시티 구현에 기여하기 위하여 공기액화 에너지저장 및 활용시스템 핵심기술 개발 및 실증연구를 지원하는 것임

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 건설기술진흥법 제7조(건설기술연구개발사업) ① 국토교통부장관은 건설기술을 향상시키고 기본계획을 효율적으로 추진하기 위하여 대통령령으로 정하는 기관 또는 단체와 협약을 체결하여 건설기술 발전에 필요한 건설기술 연구ㆍ개발 사업을 할 수 있다. (이하 생략)

- 건설기술진흥법 제9조(건설기술의 연구개발 등의 권고) 국토교통부장관은 건설기술의 연구ㆍ개발과 관련된 공공기관ㆍ법인ㆍ단체ㆍ대학(이들의 부설연구소 등을 포함한다. 이하 “건설기술연구기관”이라 한다)의 인력ㆍ자금ㆍ시험시설 및 기술정보의 효율적 활용과 선진 건설기술 획득을 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 공동연구를 추진하거나 건설기술연구기관의 건설기술 연구ㆍ개발을 지원할 수 있다.

- 국토교통과학기술육성법 제8조(연구개발사업의 추진) ① 국토교통부장관은 종합계획을 효율적으로 추진하기 위하여 국토교통과학기술 연구개발사업(이하 “연구개발사업” 이라 한다)을 할 수 있다. (이하 생략)

② 추진경위

- ‘19.06.  : 제로에너지건축 보급 확산 계획(국토부)

- ’20.12.  : 2050 탄소중립 추진 전략 발표(관계부처 합동)

- ~’21.12. : 재생에너지 연계 공기액화를 통한 에너지 저장 및 활용 시스템 기술개발 기획연구 착수(국토부)

- ’22.04.~ : 본 사업 착수(주관연구기관: 한국기계연구원)

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 해당없음

- 사업기간 : ’22~’26

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	3,000	4,875	4,623	5,200	8,233

- 기타: 해당없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연

- 사업시행주체 : 국토교통부(주관부처), 국토교통과학기술진흥원(전문기관)

- 사업 수혜자 : 대학, 기업, 출연연 등

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조․피출연 등 기관명	지원 금액 (2026계획)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
공기액화 기반에너지 저장및활용 시스템기술개발	출연	가. ｢중소기업기본법｣ 제2조에 따른 중소기업에 해당하는 연구개발기관	8,233 백만원	연구개발비의 100분의 75 이하	｢국가연구개발혁신법 시행령｣ 제19조
		나. ｢중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법｣ 제2조제1호에 따른 중견기업에 해당하는 연구개발기관		연구개발비의 100분의 70 이하
		다. ｢공공기관의 운영에 관한 법률｣ 제5조제4항제1호에 따른 공기업에 해당하거나 ‘가’, ‘나’에 해당 해당하지 않는 연구개발기관		연구개발비의 100분의 50 이하

3) 2026년도 계획 산출 근거

□ 공기액화 기반 에너지 저장 및 활용 시스템 기술개발 : (2025) 5,200백만원 → (2026 계획) 8,233백만원, +58.3%

① 공기액화 기반 에너지 저장 및 활용 시스템 기술개발

: (2025) 5,200백만원 → (2026 계획) 8,233백만원, 3,033백만원 증액(+58.3%)

- (계획) 국토부 제로에너지 건축물 인증 3단계 추진계획(‘30년) 수립 등 제로에너지 시티 구현에 필요한 연구개발을 위해 8,233백만원 예산 계획

- (산출) (계속) 1개 x 8,233백만원 x 12/12 = 8,233백만원

ㅇ 2025년도 계획 및 2026년도 계획 산출 세부내역 비교

2025년 계획		2026년 계획
예산	산출내역	예산	산출내역
공기액화기반에너지저장및활용시스템기술개발 5,200 백만원	○ 연구활동비등(360-05) : 5,200백만원 가. 공기액화 에너지 저장 시스템 실·검증 테스트베드 구축 및 액화공정 시제품 구축 및 기자재 구매 등 (2,164백만원) ㆍ 액화공정 테스트베드 운전 검토 및 구축 지원, 상용급(50 MW급) 공기액화 액화공정 개념설계 등 : 2,164백만원 나. 액체공기 발전 공정 실·검증 테스트베드 구축을 위한 냉열 저장 시스템 및 기자재 구매 등 (1,800백만원) ㆍ 액체공기 발전공정 테스트베드 구축 : 1,800,백만원 다. 공기액화 에너지 저장 시스템 테스트베드 구축을 위한 유틸리티 구축공사, 기초공사, 배관공사 등 (1,236,000천원) ㆍ 테스트베드 공사를 위한 시공용 상세 설계 및 설치를 위한 기자재 발주 및 착공 : 1,236,000천원	공기액화기반에너지저장및활용시스템기술개발 8,233 백만원	○ 연구활동비등(360-05) : 8,233백만원 가. 공기액화 에너지 저장 시스템 실·검증 테스트베드 구축 및 액화공정 시제품 구축 및 기자재 구매 등 (3,700백만원) ㆍ 10 톤/주기 액화공정 테스트베드 구축 및 운전, 상용급(50 MW급) 공기액화 액화공정 기본설계 등 : 3,700백만원 나. 액체공기 발전 공정 실·검증 테스트베드 구축을 위한 냉열 저장 시스템 및 기자재 구매 등 (2,300백만원) ㆍ 0.5 MW, 1.5 MWh /주기 액체공기 발전공정 테스트베드 구축 및 운전, 상용급(50 MW급) 공기액화 발전공정 개념설계 : 2,300백만원 다. 공기액화 에너지 저장 시스템 테스트베드 구축을 위한 유틸리티 구축공사, 기초공사, 배관공사 등 (2,233백만원) ㆍ 0.5 MW, 1.5 MWh 공기액화 기반 에너지 저장 및 활용시스템 테스트베드 통합 운전 : 2,233,000천원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
특허등급 지수 (단위: % )	목표	-	-	3.73	3.84	3.96	최근 5년간(’16∼’20) 플랜트연구(R&D) 사업*의 특허등급지수의 평균 값(3.73)을 목표치로 설정	특허 등급 지수 = [eqn: sum _{i} ^{} (A _{i} TIMES B _{i} )/ sum _{} ^{} A _{i}] (Ai: 등급별 국내외 특허등록 건수, Bi: 특허등급별 가중치)		국토교통 R&D 사업관리시스템 , 국가과학기술 지식정보서비스(NTIS), 특허정보원 DB
	실적	-	-	6.67	-	-
	달성도	-	-	100%	-	-
공기액화 기반 에너지저장 및 활용 시스템 국내기술 확보 건수 (단위: 건)	목표	9	9	8	3	10	공기액화 기반 에너지 저장 및 활용시스템 개발 및 실증을 위해서 1단계에서 요구되는 핵심기술에 대한 기술개발 성과물	국내기술 확보 건수 = ∑(핵심기술 성과물 건수)		국토교통R&D사업관리시스템, 연차(단계) 실적·계획서, 전문가 평가 보고서
	실적	9	9	8	-	-
	달성도	100%	100%	100%	-	-
성능시험평가 달성 수준 (단위: %)	목표	-	-	7	25	100	공인기관 또는 전문가 5인 이내의 성능시험평가 이행 여부를 확인하여 개발과정에서 도출되는 주요 산출물에 대한 누적 확보 수준을 성과지표로 설정	성능시험평가 달성 수준(%) = Σ(성능목표를 달성한 시험평가 산출물 누적 건수) / (사업수행기간 내 총 산출물 건수) × 100		국토교통R&D사업관리시스템, 연차(단계) 실적·계획서, 공인기관 성능평가보고서, 전문가 평가 보고서
	실적	-	-	7	-	-
	달성도	-	-	100%	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	ㅇ ‘공기액화 기반 에너지 저장 및 활용 시스템 기술개발’ 과제 착수(‘22.4~) ㅇ 에너지 저장용 공기액화 공정 및 액화 핵심 기자재, 액체공기 발전 공정 기본 설계 및 극저온 냉열저장장치, 테스트베드시스템 요구 사항 분석 및 공정 등 기본설계 추진(∼’22.12)
2023	ㅇ 에너지 저장용 공기액화 공정 및 액화 핵심 기자재, 액체공기 발전 공정 상세 설계 및 극저온 팽창기 제작도면 작성 (∼’23.12) ㅇ 극저온 냉열저장장치 활용 사양서 도출, 테스트베드 기본설계 및 상세설계 업데이트, 상세설계 리스트 도출, 3D design, modelling착수(∼’23.12)
2024	ㅇ 공기액화 에너지 저장 액화 공정 운전 시나리오 수립 및 액화 핵심 기자재 제작/조립/시험(∼’24.12) ㅇ 액체공기 발전 공정 상세 설계 및 극저온 냉열저장장치 상세 설계(완료)/시방서 작성(∼’24.12) ㅇ 테스트베드 물량 산출을 위한 상세설계 패키지 개발(∼’24.12)
2025	ㅇ 액화공정 시운전 및 상용급 액화공정 개념설계(∼’25.12) ㅇ 액체공기 발전공정 테스트베드 구축 진행 및 기자재 발주(∼’25.12) ㅇ 테스트베드 공사를 위한 시공용 상세 설계 및 설치 위한 기자재 발주 및 착공(’25.11∼)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 :

- (사회적 효과) 정부 ‘2050 탄소중립 추진전략’(’20.12)에서 온실가스 감축의 “능동적 대응”을 위한 도시·국토차원의 신재생에너지의 보급·확대에 기여

- (경제적 효과) 대용량 ESS와 장비/기자재 관련 국내 산업 생태계 구축 및 고용창출에 기여

- (기술적 효과) 대용량 에너지저장 기반 재생에너지 도시보급 확대 및 에너지 공급체계 구축 및 재생에너지 기반 도시 에너지 자립률 제고

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지: 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당없음

7) 사업 집행절차

공기액화 기반 에너지 저장 및 활용 시스템 기술개발(R&D) 사업

부처		피출연·피보조 기관		간접보조사업자· 사업수행자
국토교통부 (8,233백만원)	=> (8,233백만원)	국토교통과학기술진흥원 (8,233백만원)	=> (8,233백만원)	한국기계연구원 외 5개 기관

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	4,623	5,200	8,233	-	-
2025~2029		5,200	8,233	-	-	-

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책: 해당없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

□ 공기액화 기반 에너지 저장 및 활용 시스템 기술개발

ㅇ (중점1) 공기액화를 통한 에너지 저장을 위한 공기액화 핵심기술 개발

ㅇ (중점2) 저장된 에너지의 발전 및 활용을 위한 액체공기 저장/발전/활용기술 개발

ㅇ (중점3) 0.5 MW/1.5 MWh급 테스트베드 실증을 위한 테스트베드 구축 및 운영기술 개발

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과

1) 「국가재정법」제85조의8제1항에 따른 재정사업자율평가 결과에 대한 기획재정부의 상위평가(심층평가) 결과: 해당없음

2) R&D사업의 경우 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」제7조제3항에 따른 부처의 R&D사업 자체성과평가에 대한 과학기술정보통신부 상위평가 결과: ‘보통’, 84.0점(과기부, ’25 상위평가)

3) 그 외 보조사업 연장평가, 재정지원 일자리사업 평가 등 개별 법률에 규정된 평가 시행 결과: 해당없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과: 해당없음

13) 부처 건의사항: 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	계획액			전년도 이월액	계획 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	당초	증감액	수정(A)
2022	3,000	-	3,000	-	3,000	3,000	100.0	100.0	-	-
2023	4,875	-	4,875	-	4,875	4,875	100.0	100.0	-	-
2024	4,623	-	4,623	-	4,623	4,623	100.0	100.0	-	-
2025	5,200	-	5,200	-	5,200	5,200	100.0	100.0	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연․피보조 기관 등)
	계획액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	당초	수정(A)
2022	3,000	3,000	3,000	3,000	-	3,000	3,000	-	-	100.0
2023	4,875	4,875	4,875	4,875	-	4,875	4,875	-	-	100.0
2024	4,623	4,623	4,623	4,623	-	4,623	4,623	-	-	100.0
2025	5,200	5,200	5,200	5,200	-	5,200	5,200	-	-	100.0

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산사항 : 해당없음

□ 2025년 계획변경 세부내역: 해당없음