사 업 명
(66) 과수디지털농업실증연구소기반구축 (1131-307)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	농촌진흥청	국립농업과학원		100	101
명칭	농림수산	농업·농촌
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1100	1131	307
명칭	농업기초기반 및 실용화 기술개발	농업과학기반연구	과수 디지털농업 실증연구소 기반 구축
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○			○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
과수디지털농업실증연구소 기반구축	소관부처	국립농업과학원
기획조정과
사업시행주체	직접수행

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경*(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
과수디지털농업 실증연구소 기반구축	1,757	630	630	1,236	1,223	593	94.1

* 추경: 추경증감액을 포함한 최종 예산액을 기재

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액
○ 기능별 분류(합계)	3,228	3,228	1,757	-	1,471	630	630	21	-	-	1,223
․건설보상비	300	300	-	-	300	600	600	-	-	-	300
․건설비	2,928	2,928	1,757	-	1,171	30	30	21	-	-	923
○ 비목별 분류(합계)	3,228	3,228	1,757	-	1,471	630	630	21	-	-	1,223
․건설보상비(410-00)	300	300	-	-	300	600	600	-	-	-	300
․기본설계비(420-01)	1,267	1,247	756	-	491	-	-	-	-	-	249
․실시설계비(420-02)	1,268	1,288	644	-	644	-	-	-	-	-	644
․감리비(420-04)	353	353	353	-	-	-	-	-	-	-	-
․시설부대비(420-05)	40	40	5	-	35	30	30	21	-	-	30

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

○ 과수디지털 재배기술의 종합적이고 체계적인 현장실증을 위한 과수 디지털농업 실증연구소 기반구축

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 농촌진흥법(법률 제19878호), 동법 시행령(대통령령 제34357호), 동법 시행규칙(농림수산식품부령 제648호)

- 농촌진흥청과 그 소속기관 직제(대통령령 제34507호), 및 시행규칙(농림축산식품부령 제656호)

- (국정과제) 모두가 잘사는 균형성장 68. 국민먹거리를 지키는 국가전략산업으로 농업 육성

② 추진경위

- 사업 추진

▪ (2021.11) 과수디지털농업실증연구소 건립 서면질의(상임위 소위, 김태흠 의원)

▪ (2021.12) 2023년 정부예산 국회 심의 증액 제기 및 확정

· 과수디지털농업실증연구소 건립 기본계획 수립 기본조사 용역비 1.5억원 반영

▪ (2022.12) 과수디지털농업실증연구소 기본계획 및 중장기 발전방안 수립

▪ (2023.3) 과수디지털농업실증연구소 업무협약 및 조달청 맞춤형서비스 약정 체결

▪ (2023.5) 공공건축 건축기획서 사전검토 및 건축심의 완료

▪ (2023.7) 도시관리계획(변경) 결정용역 계약

▪ (2023.10) 건축설계 기술용역 착수

▪ (2023.12) 설계 및 기술용역 중지(부지내 암반 발견)

▪ (2024.1) 부지변경 관련 협의(충주시)

▪ (2024.4) 대체부지 현장조사 및 예정지 선정

▪ (2024.8) 부지변경 및 총사업비 협의조정 완료(기재부)

▪ (2024.11) 국유재산 사용승인 완료(기재부)

▪ (2025.5) 기본설계 완료 및 적정성 검토 요청

▪ (2025.7) 부지매입 관련 업무협의(충주시)

▪ (2025.8) 계획설계 적성성 검토(조달청)

▪ (2025.9) 추경 확정(충주시)

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 387.91억원

- 사업기간 : 2023 ~ 2027

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	783	3,228	630	1,223

- 기타 : 부지면적 180,862m2, 건물연면적 6,158m2

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행, 국고 90.9%, 지방비(충주) 9.1%

- 사업시행주체 : (주관기관) 국립농업과학원, (참여기관) 충북 충주시

- 사업 수혜자 : 농업관련 정책부서, 과수재배 농가, 농산업체 및 소비자

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

(1) 과수디지털농업실증연구소 기반구축 내역 : (‘25) 630 → (’26) 1,223백만원, (+593백만원, +94.1%)

- 설계 및 토지보상을 위하여 총사업비 내 26년 사업예산 1,223백만원 요구

* 건설보상비 300, 기본설계비 249, 실시설계비 644, 시설부대비 30

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

’25년 예산		’26년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
630	○ 건설보상비(410-00) : 600백만원 가. 토지보상을 위한 보상비 : 600백만원 ○ 시설부대비(420-05) : 30백만원 가. 조달청 수수료 및 인·허가 수수료 : 30백만원	1,223	○ 건설보상비(410-00) : 300백만원 가. 토지보상을 위한 보상비 : 300백만원 ○ 기본조사 설계비(420-01) : 249백만원 가. 군관리계획, 토목, 건축 및 연구행정동 기본설계 : 249백만원 ○ 실시설계비(420-02) : 644백만원 가. 실시설계(건축, 토목, 연구행정동) 용역 : 644백만원 ○ 시설부대비(420-05) : 30백만원 가. 조달청 수수료 및 인·허가 수수료 : 30백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① ’22~’26년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도 : 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	◦ 과수디지털농업 실증연구소 구축 기본계획 수립 용역 추진(2022.2~5) - 구축계획, 소요예산, 운영방안, 경제성 분석 등 기본계획 수립 ◦ 과수디지털농업 실증연구소 구축 세부계획 수립 용역 추진(2022.5~12) - 추진전략, 부지 공모계획 수립 및 적정 부지선정, 타당성 검토 등
2023	◦ 과수 디지털농업 실증연구소 업무협약 체결(2023.2) ◦ 조달청 맞춤형 서비스 약정 체결(2023.3) ◦ 공공건축 건축기획서 사전검토 및 검축심의 완료(2023.5) ◦ 도시관리계획(변경) 결정용역 계약(2023.7) ◦ 건축설계 및 기술용역 계약 체결(2023.11) ◦ 사전재해영향성 검토용역 및 환경영향평가용역 계약 체결(2023.12)
2024	◦ 암반발견에 따른 부지변경 협의(충주시)(2024.1) ◦ 대체부지 현장조사(2024.2) ◦ 대체부지 예정지 선정(2024.4) ◦ 부지변경 및 총사업비 협의조정 완료(기재부)(2024.8) ◦ 국유재산 사용승인 완료(기재부)(2024.11) ◦ 설계 및 도시관리계획, 문화재지표 용역 재개(2024.11)

③ 향후(’26년도 이후) 기대효과

○ 농축산 빅데이터, AI 등 농업활용 핵심 개발기술 실증으로 현장 보급 촉진

· 노지 데이터(환경·생육·병해충 등) 자동 수집 시스템 및 정밀처방농업 실증

· 신기술 및 단일기술의 융복합을 통해 현장문제 해결형 연구 기반 구축

○ 종합적이고 체계적인 현장실증 후 농가보급으로 시설 및 노지디지털 기반 구축

· 첨단농기계 실증으로 빅데이터 기반 영농 솔루션 실증

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역

□ 총사업비 정보

(단위: 억원)

연도	사업기간	2022까지 기투자액	2023	2024	2025	2026	2026이후 투자계획	계
사업비	2023~2027	-	6.36 (국6.36)	29.86 (국29.86)	41.5 (국6.3)	12.4 (국12.4)	297.79 (국297.79)	387.91 (국352.71)

□ 총사업비 변경내역(변경일자 및 규모, 변경사유)

(단위: 억원)

구분	변경연도	총사업비		사업기간		변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최초	2023	420		2023	2026
(1)차 변경	2023		416	2023	2026	- 설계비 낙찰차액 감액
(2)차 변경	2024		388	2023	2027	- 암반발견에 따른 부지변경으로 보상비 감액

7) 사업 집행절차

계획수립(‘22)		계획설계(‘23~’24)		실시설계(‘25)		시설공사(‘26~’27)
▪과수 디지털농업 실증연구소 구축 기본계획 수립 ▪부지 공모계획 수립 및 선정		▪기본조사 설계 (도시군 관리계획, 환경영향 평가, 문화재조사 등)		▪과수 디지털농업 실증연구소 구축 실시설계 및 토지보상		▪부지 기반조성, 건축시공, 실증포장 조성 등 ▪실증연구소 준공(‘26)

연 차	주요 내용
계	설계 → 토지보상 → 공사 → 완공
2023년 (1년차)	□(기본설계) 과수 디지털농업 실증 연구소 사업인가를 위한 도시·군관리계획결정용역 등 4개 기본설계용역 계약 및 추진
2024년 (2년차)	□(기본설계) 도시·군관리계획결정·환경영향평가·재해영향평가·문화재지표조사 ⇒ 사업인가 □(토지보상) 사업부지 토지보상액 산정 및 보상 개시
2025년 (3년차)	□(실시설계) 실증연구소 및 실증포장·도로 설계 완료 □(토지보상) 사업부지 토지보상액 산정 및 보상 완료
2026년 (4년차)	□(공사착공) 공사계약, 토목공사 추진 후 주요 연구동 등 본공사 개시
2027년 (5년차)	□(공사완료) 본공사 완공, 포장·도로·조경 등 기반시설 준공

8) 각종 평가 : 해당없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산현액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	150	-	150	150	149	99.3	-	1
2023	783	-	783	783	636	81.2	-	147
2024	3,228	-	3,228	3,228	1,757	54.4	-	1,471
2025	630	-	630	630	21	3.3	-	609

2) 주요 결산사항

□ 2022년~2025년 결산사항

2022	- 해당없음
2023	- 불용 : 설계비 낙찰차액 147백만원 불용
2024	- 불용 : 총사업비 조정에 따른 설계비 집행잔액 242백만원 불용
2025	- 불용 : 공시지가 상승에 따른 건설보상비 집행잔액 등 609백만원 불용

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음