사 업 명
(95) 국립공주박물관 어린이박물관 건립 (2831-390)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	문화체육관광부	국립중앙박물관		060	061
명칭	문화및관광	문화예술
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2800	2831	390
명칭	국립박물관운영	국립박물관 운영	국립공주박물관 어린이박물관 건립
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
국립공주박물관 어린이박물관 건립	소관부처	국립공주박물관
사업시행주체	학예연구실

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
국립공주박물관 어린이박물관 건립	-	-	-	330	255	255	순증

□ 기능별(내역사업별) 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월 액	불용 액
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255
․공주박물관 어린이박물관 건립	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

□ 사업목적

- 지역의 역사와 문화를 특성화한 어린이박물관 건립으로 놀이와 학습이 어우러진 문화 플랫폼을 조성하여 매력적이고 공정한 문화접근 기회 보장

□ 사업내용

- 웅진백제문화 전문박물관과 백제 역사유적지구를 특성화한 어린이 박물관 건립, 놀이와 학습이 어우러진 신개념 문화 플랫폼 조성

- 신기술융합콘텐츠를 적용한 온·오프라인 교육·체험 서비스 확대

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

- ｢박물관 및 미술관 진흥법｣ 제4조 1항 6의 2,7, 제10조 4항

- 「국가균형발전특별법」 제1조

- 「국토기본법」 제3조

- 「지역문화진흥법」 제3조

② 추진경위

- 2020.12. 국립공주박물관 어린이박물관 건립 기본계획 연구용역 완료

- 2024. 7. 기획재정부 ‘국립시설 사전타당성평가’ 완료(B/C 1.60)

- ‘25년도 문화체육위원회 국정감사 지적사항

·유네스코 세계문화유산 도시, 국립공주박물관 보유 문화유산을 고려, 어린이박물관 건립과 충청권박물관의 직급 상향 필요

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 14,603백만원(국비 100%)

- 사업기간 : 2026~2029

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	255

- 사업면적: 연면적 3,030㎡

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 국립공주박물관

- 사업 수혜자 : 일반국민

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거: 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 국립공주박물관 어린이박물관 건립

: (2025 본예산) 0 → (2026) 255백만원, 순증

- (요구) 국립공주박물관 어린이박물관 기본설계를 위한 설계비 255백만원 신규 편성

- (산출) 기본설계비 : 255백만원 (10,393백만원(공사비)×5.57%(요율)×40%(기본설계 반영분))+부가세(10%)

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도: 해당없음

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적: 해당없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- (지역문화 균형발전) 지역 고유의 역사문화를 활용한 콘텐츠 확장 및 취약계층을 배려한 배리어프리 실현으로 문화격차 해소, 모두가 자유롭게 이용 가능한 문화향유 기회 제공

- (가족이 함께하는 여가 시설 확보) 저출산과 고령화 등에 따란 관람형태 변화 및 문화향유기회 확대 요구에 맞춘 교육 ‧ 돌봄 ‧ 소통의 문화공간으로 세대간 연결을 위한 구심적 역할 수행

- (연차별 신규 방문객 수요 증가) 어린이박물관 완공(2029년) 이후 신규방문객의 증가

년도	2029년	2030년	2031년	2032년	2033년	2034년
신규방문 인원	105,756명	105,858명	105,988명	106,030명	106,055명	106,061명

* (2024년 방문인원) 804,140명

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지

□ 근거: 『국립시설 사전타당성평가 국립공주박물관 어린이박물관 건립』

기획재정부, KDI 한국개발연구원, 2024.7.

□  국립공주박물관 어린이박물관건립 사전 타당성조사 결과 편익 추정

○ 국립공주박물관 어린이박물관 건립의 편익은 경제적 객단가(여행비용+재무적객단가)와 교육 및 체험프로그램에 대한 편익의 합으로 산출되며, 이러한 이유로 여행비용, 재무적 객단가, 교육·체험 프로그램 편익을 산출함

○ 2029년~2058년까지 편익 추정 결과 총 100,766백만원의 편익이 발생함

□ 국립공주박물관 어린이박물관건립 타당성조사 결과 비용 추정(2023년 말 기준)

○ 총사업비 비용 추정

(단위: 백만원)

구분	사업계획안(A)	검토안(B)	대안(C)
총사업비	23,307	20,770	16,342원
공사비	19,942	14,986	11,433
시설부대비	3,365	2,315	1,843
예비비	-	1,730	1,328
용지보상비	-	1,739	1,739
증감		(B-A) -2,537	(C-A) -6,965

* (비용 변동요인) 건축규모 조정, 공사비 및 전시공사비 단가 변경으로 인한 것이며, 공사비에 따라 연동되는 시설부대경비의 변경

구분	총면적	공사비 단가	전시공사비 단가	전시면적
계획안	3,950.98㎡	4,646,000원	1,589,055원	1,004.22㎡
검토안	3,950.98㎡	3,327,997원	1,690,124원	1,004.22㎡
대안	3,030.61㎡	3,327,997원	1,690,124원	733.54㎡

* (사전타당성조사 결과 경제성)

- (검토안) B/C 1.32 경제성을 갖춤

- (대  안) B/C 1.60 경제성을 갖춤

구분	총비용의 현재 가치	총편익의 현재가치	B/C비율	순현재가치(NPV)
검토안	33,532백만원	44,336백만원	1.32	10,762백만원
대안	27,698백만원	44,336백만원	1.60	16,593백만원

□ 총사업비 500억원 이상인 경우 예비타당성조사 시행유무 및 그 결과요지 : 해당없음

□ 시행하지 않은 경우 그 이유를 적시 : 해당없음

6) 총사업비 대상사업 정보 : 해당사항 없음

7) 사업 집행절차

추진절차		시행주체		절차내용
① 기본ㆍ실시설계		국립공주박물관		어린이박물관 건립을 위한 기본설계(2026.1.~2026.11.)
⇩
② 설계검토 및 완료		국립공주박물관 등		실시설계, 인허가, 심의 등 행정 협의 및 설계검토ㆍ완료(~2026.12.)
⇩
③ 공사발주 요청 및 건축협의		조달청 등		공사발주 요청 및 건축협의(2027.1.~12.)
⇩
④ 공사계약 및 착공		조달청 등		공사계약 및 착공(2027.12~2028.3.)
⇩
⑤ 공사실시 및 전시장 조성		시공사		어린이박물관 건립 공사 실시(2028.3.~2029.12.)
⇩
⑥ 준공 및 개관		국립공주박물관		어린이박물관 준공 및 개관(2029.12.)

8) 각종 평가 : 해당사항 없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당사항 없음