사 업 명
(10) 여성사전시관 (1232-332)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	성평등가족부	성평등정책실 성평등정책관	-	080	08C
명칭	사회복지	여성･가족･청소년
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1200	1232	332
명칭	성평등정책기반강화 및 여성경제활동지원	양성평등문화확산 및 국내협력네트워크 강화	여성사전시관
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
				○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
◦			◦		100
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
여성사전시관 운영	소관부처	성평등정책실 성평등정책관
성평등문화협력과
사업시행주체	한국양성평등교육진흥원
국립여성사박물관 건립	소관부처	성평등정책실 성평등정책관
성평등문화협력과
사업시행주체	성평등가족부

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
여성사전시관	574	2,411	2,411	9,491	9,317	6,906	286.4

□ 기능별(내역사업별) 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액
○기능별 분류(합계)	4,352	4,352	574	-	3,778	2,411	2,411	679	-	1,732	9,317
･여성사전시관 운영	569	569	569	-	-	578	578	578	-	-	1,061
･간담회 등 사업추진	5	5	5	-	-	5	5	5	-	-	-
･국립여성사박물관 건립	3,778	3,778	-	-	3,778	1,828	1,828	96	-	1,732	8,256

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (여성사전시관 운영) 국립여성사전시관 상설전시관 운영, 특별 기획전 및 교육 프로그램 운영 등을 통해 역사 속 여성들의 역사와 양성평등 문화의 전형을 발굴하고 재조명함으로써 여성사에 대한 관심 제고 및 국민들의 양성평등 의식 고양

- (국립여성사박물관 건립) 여성의 역사를 체계적으로 발굴･재조명하고 다양한 역사인식의 확산을 위한 복합 전시･교육･문화공간 조성 추진

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- ｢양성평등기본법｣ 제50조(여성사박물관의 설립･운영) 성평등가족부장관은 역사 속 여성의 역할과 역사발전에 기여한 인물을 조명하고, 여성을 위한 교육과 국민의 양성평등의식 고양을 위한 장으로 활용하기 위하여 여성사박물관을 설립･운영할 수 있다.

② 추진경위

- 상대적으로 저평가된 우리나라 여성사에 대한 재조명을 위해 여성(학)계 및 여성단체에서 여성사 전문전시관의 지속적인 설립 요구

- ’01년 여성부 출범 이후 실시한 여론조사를 통해 여성사전시관의 설립 필요성을 인정하고, 양성평등 의식 교육의 장으로 여성사전시관 설립(’02.12월 서울여성플라자 內)

- 제2종 박물관 등록(문화체육관광부) 및 ‘국립여성사전시관’으로 명칭 변경(’12.9월)

- 고양시 지방합동청사 이전개관(’14.9월)

- 1종 전문박물관으로 유형변경 등록(’18.6월)

- 국립여성사박물관 건립 부지 타당성 연구(’19.4~8월, (사)한국문화공간건축학회)

- 박물관 건립부지 소유 및 사용 기관 협의(’19.6~10월, 국조실･여정연･양평원)

- 문체부의 설립 협의 및 설립타당성 사전평가 통과(’19.11월~’20.6월)

- 국립여성사박물관 건립을 위한 ’21년도 예산(설계비) 반영(’20.12월)

- 국립여성사박물관 기본계획 수립․고시('21.4월~)

- 설계공모지침 마련(~'21.7월), 공공건축심의(9월), 설계공모 및 계약체결(12월)

- 계획설계 완료(‘22.6월), 서울시 경관심의(‘22.6~7월), 계획설계 적정성 검토(’22.7~9월, 조달청)

- 건축설계용역 중간설계 완료(’22. 9~11월)

- 중간설계 적정성 검토(~’23.5월, 조달청)

- 중간설계에 대한 총사업비 조정 심의(~‘23.11월, 기재부)

- 기재부(KDI)주관 사업계획 적정성 재검토 용역(‘23.12월~’24.10월)

- 중간설계에 대한 총사업비 조정협의 완료(’24.11월), 실시설계 추진(’24.12월~)

- 은평구 건축심의 완료(‘25.5월)

- 조달청 실시설계 적정성 검토 완료(‘25.9월~12월)

- 은평구 건축허가 신청 및 관련 부서 협의 중(’25.11월~)

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 31,103백만원(국립여성사박물관 건립)

- 사업기간 : ‘02~계속(여성사전시관 운영) / ’21~'28(국립여성사박물관 건립)

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	1,851	4,345	4,352	2,411	9,317

- 기타 : 국립여성사박물관 건립(부지면적 2,000m2, 건축연면적 6,392m2)

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행, 민간보조

- 사업시행주체 : 성평등가족부, 보조사업자(한국양성평등교육진흥원)

- 사업 수혜자  : 일반국민

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조․피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
여성사전시관 운영	보조	한국양성평등교육진흥원	1,061	100%	보조금관리에 관한 법률 제9조 양성평등기본법 제50조

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 여성사전시관 운영

: ('25) 578백만원 → (’26) 1,061백만원 (증 483백만원)

- (요구) 국립여성사전시관 위탁운영‧관리를 위한 소요예산 및 국립여성사박물관 개관준비 예산

- (산출) 전시관 종사자 인건비 및 운영비 589백만원(인건비 323, 운영비 266)

박물관 개관 대비 유물 구입비 372백만원

전시계획 연구비 100백만원

② 국립여성사박물관 건립

: (’25) 1,828백만원 → (’26) 8,256백만원 (증 6,428백만원)

- (요구) ’25년말 공사계약 예정으로 ’26년 본격적인 시설공사 추진에 필요한 예산 증액 필요(총 사업비의 약 28% 수준 반영)

- (산출) 공사비 7,606백만원 (* 총 공사비 27,346 대비 약 28% 반영)
감리비  633백만원 (* 총 감리비 2,274 대비 약 28% 반영)
시설부대비 17백만원 (* 총 시설부대비 62 대비 약 28% 반영)

* 공사비 반영비율 공통 적용(28%) 적용

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
여성사전시관 고객만족도(점)	목표	91.0	92.7	87.7	88.2	88.7	‘25년 목표대비 + 0.5점	설문조사 만족도결과 점수의 평균값	고객 만족도 조사 실시
	실적	95.2	93.0	92.8	92.5	-
	달성도	104.6	100.3	105.8	104.8	-
여성사전시관 관람객 수(명)	목표	10,400	30,264	31,860	33,453	35,125	‘25년 목표대비 약 5% 증	연간 관람 인원 총계	관람객 현황표
	실적	25,220	38,375	46,537	40,212	-
	달성도	242,5	126.8	146.1	120.2	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	- ‘가족의 역사’ 주제 특별기획전 실시(’22.9.~’23.7.) - 일반 및 순회 전시전 운영 등 진행 - 국립여성사박물관 건축설계용역 추진
2023	- ‘키우다-모두 함께 한 육아’ 주제 특별기획전 실시(’23.9.~’24.7.) - 일반 및 순회 전시전 운영 등 진행 - 국립여성사박물관 중간설계 적정성 검토(조달청), 총사업비 조정심의(기재부) 진행
2024	- ‘키워드 여성사 #첫 번째 이야기, 일하는 여성’ 주제 특별기획전시(’24.9.~), 일반 및 순회 전시전 운영 등 진행 - 기재부(KDI)주관 사업계획 적정성 재검토(~‘24.10월), 중간설계에 대한 총사업비 조정협의 완료(’24.11.)
2025	- ‘광복 80주년 기념 여성과 독립운동’ 주제 특별기획전시(‘25.8.~), 일반 및 순회 전시전 운영 등 진행 - 은평구 건축심의 완료(‘25.5.), 조달청 실시설계 적정성 검토완료(‘25.12.)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 양성평등과 관련한 현실성 있는 전시･교육 및 참여 프로그램 확대를 통해 전시관 인지도 향상 및 관람객의 참여 확대

- 교육프로그램 운영을 통해 청소년들의 꿈과 끼를 찾는 진로탐색 및 직업체험 기회 제공

- 여성사전시관을 여성사박물관으로 확대‧발전시켜 미래시대 양성평등 교육의 장으로 활용

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 정보

- 총사업비 관리 대상 사업인 경우 작성

(단위: 억원)

연도	사업기간	2022까지 기투자액	2023	2024	2025	2026	2027이후 투자계획	계
사업비	2021~2028	7	0.02	-	18	82	203.98	311

7) 사업 집행절차

< 여성사전시관 운영 >

			운영위탁사업	특별기획전 개최 교육프로그램 운영 상설전시장 관리
기본계획 수립
			유물 및 물품 구입･관리
			국내외 전시기법 조사･연구
			중장기계획 수립 등

< 국립여성사박물관 건립 > * 직접수행

계획 수립		건축설계		공사 추진		준공 및 개관
- 기본계획 수립 및 고시		- 설계공모 및 계약체결 - 용역 수행 - 건축 인허가		- 시설공사 - 전시공사 - 감리용역 등		- 공사 준공 - 시운영 및 개관

8) 각종 평가

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적

○ 향후 실시설계 및 공사가 차질없이 진행되도록 집행관리를 철저히 하고, 불필요한 사업기간 연장 등으로 총사업비가 증가하지 않도록 면밀히 관리할 것(’24년 결산국회)

2) 대외공개 평가

○ (보조사업 연장평가) 전시계획, 유물수집계획 수립, 디지털 콘텐츠 개발 등 국립여성사박물관 건립 지원을 강화하여 개관, 관리운영에 차질이 없도록 사업역량 집중 필요

3) 자체평가 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산현액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	1,851	-	1,851	1,895	1,020	53.8	866	9
2023	4,345	-	4,345	5,211	567	10.9	-	4.644
2024	4,352	-	4,352	4.352	574	13.2	-	3,778
2025	2,411	-	2,411	2,411	679	28.2	-	1,732

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요사항

2022	- 실시설계비 이월
2023	- 관계기관 협의에 따른 사업 순연으로 공사비 불용
2024	- 관계기관 협의에 따른 사업 순연으로 공사비 불용
2025	- 관계기관 협의에 따른 사업 순연으로 공사비 불용

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음