사 업 명
(45) 국산소자부품우주검증지원(R&D) (1337-305)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	우주항공청	우주항공산업국		150	155
명칭	과학기술	과학기술연구개발
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1300	1337	305
명칭	우주항공진흥	우주개발진흥	국산소자부품우주검증지원(R&D)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		○
□ 사업 담당자
사업명	구분
국산소자부품우주검증지원(R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
우주항공산업국	김정훈	-	안보현
우주항공산업기반과	055-856-4350	-	055-856-4357
사업시행주체	한국항공우주연구원	위성기술연구부	권기호	042-860-2922

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
국산소자부품 우주검증지원 (R&D)	1,400	5,600	5,600	2,500	2,500	△3,100	△55.4

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025년 12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	1,400	1,400	1,400 [1,400]	-	-	5,600	5,600	5,600 [4,547]	5,600	5,600 [4,547]	-	-	2,500
․국산소자부품우주검증지원	1,400	1,400	1,400 [1,400]	-	-	5,600	5,600	5,600 [4,547]	5,600	5,600 [4,547]	-	-	2,500
○ 비목별 분류(합계)	1,400	1,400	1,400 [1,400]	-	-	5,600	5,600	5,600 [4,547]	5,600	5,600 [4,547]	-	-	2,500
․연구개발활동비등(360-05)	1,400	1,400	1,400 [1,400]	-	-	5,600	5,600	5,600 [4,547]	5,600	5,600 [4,547]	-	-	2,500
○ 기능·비목별 분류(합계)	1,400	1,400	1,400 [1,400]	-	-	5,600	5,600	5,600 [4,547]	5,600	5,600 [4,547]	-	-	2,500
․국산소자부품우주검증지원	1,400	1,400	1,400 [1,400]	-	-	5,600	5,600	5,600 [4,547]	5,600	5,600 [4,547]	-	-	2,500
-연구개발활동비등(360-05)	1,400	1,400	1,400 [1,400]	-	-	5,600	5,600	5,600 [4,547]	5,600	5,600 [4,547]	-	-	2,500

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (목적) 국산 전기・전자 소자급 부품, 반도체 연구 성과물 등의 우주급 사용이력 확보 및 활용 분야 확대를 위한 우주검증 지원

- (목표) 큐브위성 기반의 국산 소자・부품 우주검증 플랫폼(12U) 3기 국내 개발

- (내용) 탑재 용이성 및 확장성을 갖는 우주검증 플랫폼을 개발하고, 국산 소자・부품 및 반도체 연구・기술 개발 성과물의 우주검증을 지원하여 우주 헤리티지 확보

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항

- 우주개발 진흥법 제18조(민간 우주개발의 촉진) ① 우주항공청장은 기본계획에 따라 민간부문의 우주개발과 연구개발투자를 활성화하고 우주개발 관련 기업을 육성하기 위한 전략을 수립ㆍ추진하여야 한다.

- (국정과제) [경제2-7] 세계를 선도할 넥스트(NEXT) 전략기술 육성(K-Space 포함)

ㆍ [경제2-7-2] 우리 기술로 K-Space 도전

ㅇ (위성 자력발사) 우리 위성은 우리 발사체로 발사하는 기술역량 확보

ㅇ (첨단위성 개발) 세계 최초 6G 통신위성 개발(’30), 10cm급 초고해상도 위성 개발, 한국형 항법위성 1호기 발사(’29) 등 세계 선도 첨단위성 개발

② 추진경위

- 시작년도: 2024년

- 추진배경: 제4차 우주개발진흥기본계획(‘22.12.)

ㆍ ‘부품검증큐브위성’에 대한 개발 계획 반영

□ 우주부품‧소자 등 검증용 플랫폼 확보 및 핵심기술 개발

ㅇ (우주검증위성개발) 탑재체‧부품‧소자 다양한 단위의 우주핵심기술 성능 검증이 가능하도록 우주검증 플랫폼 위성 개발

- (부품검증큐브위성) 국내 부족한 소자‧부품 분야 등의 기술력 향상 및 우주 헤리티지 확보를 위한 소자 우주검증 플랫폼* 구축

* ① 기업 개발 부품을 보드‧모듈 단위로 본체(출연연 개발)에 탑재

② 기관‧기업이 자체 큐브위성을 제작‧탑재하는 방식 지원(누리호 4차 발사(’25)~)

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 12,000백만원

- 사업기간 : 2024년 ~ 2027년

- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	1,400	5,600	2,500

- 기타 : 국산 소자・부품 우주검증 위성(12U) 3기 개발

② 사업추진체계

- 사업시행방법: 출연

- 사업시행주체: 한국항공우주연구원

- 사업 수혜자: 국내 우주 관련 기관 및 산업체 등

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조․피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
국산소자부품 우주검증지원	출연	한국항공 우주연구원	2,500백만원	100	・과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진) ・국가재정법 제12조(출연금)

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 국산소자부품우주검증지원

: (2025 본예산) 5,600백만원 → (2026 예산) 2,500백만원, 3,100백만원 감액(△55.4%)
(‘27년 사업 종료에 따른 지출 구조 자연감소 감안)

- 1호 검증위성 임무수행, 2호 검증위성 조립・시험・발사・임무수행

- (산출) (인건비) 500, (시제품 제작비) 1,200, (연구시설비) 400, (기타) 400

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년도 본예산		2026년도 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
5,600 백만원	○ 연구개발활동비등(360-05) : 5,600,000천원 가. 우주검증플랫폼 개발・시험・납품 나. 1호 검증위성 조립・시험・발사・임무수행	2,500 백만원	○ 연구개발활동비등(360-05) : 2,500,000천원 가. 1호 검증위성 임무수행 나. 2호 검증위성 조립・시험・발사・임무수행

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
우주검증플랫폼 주요 목표성능 달성도 (단위: %)	목표	-	-	-	95	100	유사 사업, 해외사례 등의 사례가 적어 기술성능 비교가 다소 어려운 관계로 연구계획서 내 성능수치를 근거로 국산 소자·부품 우주 검증 플랫폼 개발을 위한 주요 목표 성능을 설정함	∑(목표성능만족여부 (만족 시 “1”, 불만족 시 “0”) X 가중치)	시험 수행 완료 검토회의 및 개발기관 내 핵심기술관리시스템(주요성능 만족여부 포함)
	실적	-	-	-	-	-
	달성도	-	-	-	-	-
우주검증플랫폼 주요 규격화 건수 (단위: 건)	목표	-	-	131	131	131	국산 소자·부품 우주 검증 플랫폼 개발을 위한 주요 규격을 분류하고 관련 내용을 설정	∑(연도별 규격화 실적(건수))	개발기관 내 핵심기술관리시스템에 등재된 규격문서(규격건수 내용 포함)
	실적	-	-	131	-	-
	달성도	-	-	100	-	-
탑재체 지원실적 (단위: 건)	목표	-	-	-	2	2	우주 검증 플랫폼을 통한 국산 소자·부품 우주 검증 탑재체 지원 실적은 우주검증플랫폼의 최종 목표이며, 우주검증플랫폼은 탑재체 공간 8U를 고려하여 2건으로 설정	∑(탑재체 지원 실적(건수))	결과보고서(탑재체 납품 근거자료 포함)
	실적	-	-	-	-	-
	달성도	-	-	-	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

	본체	탑재체
2024	ㅇ (본체) 입찰공고(1차)(‘24.6.4.) ㅇ (본체) 제안요청서 설명회 개최(’24.6.10.) ㅇ (본체) 입찰공고(2차)(‘24.6.21.) ㅇ (본체) 제안서평가(’24.7.3.) ㅇ (본체) 제작 주관 업체 선정(‘24.7.24.) - ㈜나라스페이스 테크놀로지 ㅇ (본체) 예비설계검토회의(‘24.9.10.) ㅇ (본체) 상세설계검토회의(‘24.12.20.)	ㅇ (1호 탑재체) 공모(‘24.4.8.~17.) ㅇ (1호 탑재체) 선정평가(’24.5.21.) ㅇ (1호 탑재체) 선정 완료(‘24.6.20.) - 삼성전자, KAIST, ㈜엠아이디
2025	ㅇ (본체) 인증모델 진동시험 - (1차) ‘25.2.6.~7., (2차) ‘25.2.24.~26., (3차) ‘25.5.20.~21. ㅇ (본체) 인증모델 열진공시험(‘25.2.6.~7.) ㅇ (본체) 인증모델 납품 완료(’25.5.22.)	ㅇ (2호 탑재체) 공모(’25.1.13.~2.7.) ㅇ (2호 탑재체) 선정평가(’25.2.25.) ㅇ (2호 탑재체) 선정 완료(’25.3.13.) - SK하이닉스, 모멘텀스페이스, 인세라솔루션, 인터그래비티 테크놀로지스, KAIST, 코스모비 ㅇ (1호 탑재체) 인증모델 납품 완료(‘25.6.5.) ㅇ (1호 탑재체) 비행모델 납품 완료(‘25.7.17.)
	ㅇ (1호 검증위성) 인증모델 열진공시험(’25.6.16.~20.) ㅇ (1호 검증위성) 인증모델 진동시험(‘25.7.16.~17.)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- 국내 기업이 개발한 국산 소자・부품의 우주 헤리티지 확보에 기여하고, 향후 우주급 부품으로써 활용 분야 확대 가능

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

7) 사업 집행절차

			우주항공청
			사업 총괄 및 예산 지원,
			사업 협약 및 진도 관리
			주관연구개발기관
			(한국항공우주연구원)
			소자급 우주부품 국산화 개발 우주환경 시험방법 개발
세부 연구개발 기관			세부 연구개발 기관			세부 연구개발 기관
능동소자 개발			수동소자 개발			소자 방사선환경 시험방법 개발

부처		피출연·피보조기관		간접보조사업자·사업수행자
우주항공청 (5,100백만원)	=> (5,100백만원)	한국항공우주연구원 (5,100백만원)	=>	공모선정 업체

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	1,400	5,600	2,500	2,500	-
2025~2029		5,600	2,500	2,500	-	-

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

<2025년> - 1호 검증위성 비행모델 납품(‘25.9월) - 1호 검증위성 발사(누리호 4차 활용) 및 초기운영(’25.11월) <2026년~2027년> - 2~3호 검증위성 발사 및 운영	1호 검증위성 구성도

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당 없음

13) 부처 건의사항 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1,400	-	1,400	-	-	-	1,400	1,400	100	100	-	-
2025	5,600	-	5,600	-	-	-	5,600	5,600	100	100	-	-

□ 출연·보조사업 등 실집행내역

(단위: 백만원, %)

구분	부처			사업시행주체(피출연․피보조 기관 등)
	예산액		집행액	교부액	전년도 이월액	교부 현액	집행액 (B)	이월액	불용액	실집행률 (B/A)
	본예산	추경(A)
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	1,400	1,400	1,400	1,400	-	1,400	1,400	-	-	100
2025. 12월말 기준	5,600	5,600	5,600	5,600	-	5,600	4,547	1,053	-	81.2

2) 주요 결산사항 : 해당 없음

라. 기타 추가자료

(1) 참고1

참고1		사업 설명자료

국산소자부품우주검증지원

1. 사업개요

□ 큐브위성 기반의 우주검증 플랫폼(12U급)을 개발하여 국산 전기‧전자 소자급 부품의 우주검증(우주이력 확보) 3회* 지원

* 누리호 4차(‘25), 5차(‘26), 6차(’27) 발사 활용(1차 당 최대 8U 지원)

(사업기간)	‘24-’27		(총사업비)		120억원, (旣)70억원			(사업규모)	1개 내역 1개 과제
(사업주체)	(전문기관)	해당사항 없음 (자체수행) ‘24: 한국연구재단 ’25~‘27: 자체수행				(주관/참여)	(주관) 한국항공우주연구원 (참여) (본체제작) ㈜나라스페이스 (탑재체1호) ㈜엠아이디, KAIST, 삼성전자 (탑재체2호) SK하이닉스, ㈜인세라솔루션, 모멘텀스페이스㈜, KAIST, 코스모비㈜, 인터그레비티 테크놀로지 (탑재체3호) ‘26년 상반기 공모를 통해 선정
(지원조건)	출연 100%	(매칭비율)		-
사업 유형	□ 예타 □ 프로그램형 □ 다부처
(주요 특징) - 큐브위성 기반의 우주검증 플랫폼을 개발하여, 국산 소자‧부품의 우주검증을 지원하는 사업은 수행 사례가 없는 선도적인 사업임 - ‘24년 종료 사업인 ’우주개발 기반조성 및 성과확산 사업‘의 ’소자급 우주부품 국산화 지원‘ 과제를 통해 개발된 국산화 부품 8종(능동2종, 수동6종)의 우주검증 지원 예정(탑재체 1호에 탑재, 25년 하반기 발사) ※ 진행경과: 본체 선정(’24.7.24.), 탑재체 1호 선정(‘24.6.29.), 탑재체 2호 선정(’25.3.13.), ‘24년 집행률/실집행률: 100%/100%

2. ‘26년 예산

ㅇ 비행모델 1호*(누리호 4차 활용 발사) 임무수행 및 비행모델 2호 테스트 및 발사(누리호 5차 활용)

* 비행모델 1호 = 본체 1호 + 탑재체 1호

- (국산소자부품우주검증지원) 탑재체 2호 납품, 비행모델 2호 테스트 및 발사, 탑재체 3호 공모‧평가‧선정, 인터페이스 상세설계 수행

(단위 : 백만원)

구분	‘25년	‘26년(안)
□ 국산소자부품우주검증지원	5,600	2,500
‣ 국산소자부품우주검증지원	1개 (계속 5,600백만원)	1개 (계속 2,500백만원)