사 업 명
(63) 궤도수송선비행모델개발및실증(R&D) (1433-307)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	일반회계	우주항공청	우주수송부문		150	155
명칭	과학기술	과학기술 연구개발
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	1400	1433	307
명칭	우주수송역량개발	우주발사체개발	궤도수송선비행모델개발및실증(R&D)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
O
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
		O
□ 사업 담당자
사업명	구분
궤도수송선비행모델개발 및 실증 (R&D)	소관부처	실·국·과(팀)	과 장	사무관	주무관
우주항공임무본부 우주수송부문	현성윤	이수지	김석원
한국형발사체 프로그램	055-856-5130	055-856-5133	055-856-5135

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년		증감 (B-A)
		본예산(A)	추경	정부안	확정(B)		(B-A)/A
궤도수송선비행모델개발및실증(R&D)	-	-	-	3,000	3,000	3,000	순증

□ 기능별(내역사업별), 목별 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025(2025.12월말)							2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액 [실집행액]	이월액	불용액	본예산	예산 현액	집행액 [실집 행액]	전년도 이월액 제외		이월 예상액	불용 예상액
									예산 현액	집행액 [실집행액]
○ 기능별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
․궤도수송선비행모델개발및실증(R&D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
○ 비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
․연구개발활동비등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
○ 기능·비목별 분류(합계)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
․궤도수송선비행모델개발및실증(R&D)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000
- 연구개발활동비등(360-05)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (궤도수송선비행모델개발및실증(R&D)) 지구저궤도 내 위성 다중궤도 사출 임무 실증을 목표로 궤도수송선* 비행모델 개발** 및 우주실증***을 통해 민간 주도 우주경제 성장 기반 확보

* 궤도수송선(Orbital Transfer Vehicle, OTV): 우주 내 궤도 간 사람과 물자를 실어나르는 우주선

** 기 개발·확보된 기술의 최적화 적용을 통한 비행용 시스템 개발

*** 위성(큐브위성 2기 이상)의 지구저궤도 내 다중궤도 투입을 목표로 궤도 전이, 궤도 조정 등 복합임무 수행 및 기술성숙도(TRL) 7 달성

※ 정부 정책에 실증 목표가 변경될 수 있음

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시

- 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진)

① 중앙행정기관의 장은 기본계획에 따라 맡은 분야의 국가연구개발사업과 그 시책을 세워 추진하여야 한다.

- 우주개발진흥법 제18조의3(우주개발사업 추진방법)

① 정부는 기본계획을 효율적으로 추진하기 위하여 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조제1항 각 호의 기관이나 단체와 협약을 맺어 우주개발사업을 시행할 수 있다.

③ 정부는 제1항에 따라 협약을 맺어 우주개발사업을 시행하는 기관이나 단체(이하 “우주개발사업시행기관”이라 한다)에 그 소요비용의 전부 또는 일부를 출연할 수 있다.

② 추진경위

- 2024년도 탐색·기획연구 착수(’24.10.)

- 기획연구 – 제1차 자문위원회 개최(’25.02.)

- 제3회 국가우주위원회 “대한민국 우주수송 추진전략(안)” 심의·의결(’25.02.)

- 과학기술혁신본부 신규사업 기획컨설팅(’25.03.)

- 과학기술혁신본부 주요R&D 전문위 사업설명(’25.05.)

- 기획연구 – 제2차 자문위원회 개최(’25.05.)

- 기획연구 – 제3차 자문위원회 개최(’25.06.)

- 기획연구 – 제4차 자문위원회 개최(서면)(’25.07.)

ㅇ (관련 공약) 2. 성장 – 1. AI 등 신산업 집중육성

- 16 글로벌 4대 첨단제조 강국 도약을 위해 혁신선도형 첨단산업구조로의 대전환을 추진하겠습니다.

ㅇ 첨단산업 혁신 K-이니셔티브로 경제안보 강화 및 미래성장동력 확보

- 빅테크 강국을 위한 D(방위·우주항공) 글로벌 기업 육성

ㅇ (관련 국정과제) 123대 국정과제(안) - 28. 세계를 선도할 넥스트(NEXT) 전략기술 육성(’25.08.)

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 467억원 (국비 : 400억원, 민간 : 67억원)

※ 총사업비는 사업 추진 과정에서 조정될 수 있음

- 사업기간 : ‘26년 ~ ‘29년

- 최근 5년 간 투입된 사업비

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	-	-	3,000

- 기타 : 해당 없음

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 출연(민간 매칭)

- 사업시행주체 : 산학연

- 사업 수혜자 : 우주관련 기업체 등

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거

내역사업명	구분	피보조․피출연 등 기관명	지원 금액 (2026예산)	지원 비율(%)	보조율 법적근거 (해당 조항)
궤도수송선비행 모델개발 및 실증 (R&D)	출연	산학연	3,000	100	우주개발진흥법 제18조의3 ③항

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 궤도수송선비행모델개발및실증(R&D)

: (2026) 3,000 백만원

- 궤도수송선 비행모델 개발 및 우주실증을 위한 신규 예산

- (산출) 궤도수송선 임무·체계설계 800백만원

추진·항전·분리 시스템 설계 및 부품 발주 1,800백만원

구조시스템 설계 400백만원

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
-	-	3,000 백만원	○ 연구개발활동비등(360-05) : 3,000백만원 가. 궤도수송선 임무·체계설계 (800백만원) ㆍ 1개x1,067백만x9/12개월=800백만원 나. 추진·항전·분리 시스템 설계 및 부품 발주 (1,800백만원) ㆍ 1개x2,400백만x9/12개월=1,800백만원 다. 구조시스템 설계 (400백만원) ㆍ 1개x533백만x9/12개월=400백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
사업 진척도 (단위: %)	목표	-	-	-	-	100.0 (신규)	사업목표 달성을 위해 마일스톤 달성 및 연차별 목표대비 진척도 평가가 중요	주요 마일스톤 진척율 달성도 평가((연도별 목표달성 마일스톤 수/연도별 주요 마일스톤 전체 수) × 100(%))	평가 단계별 결과 확인(SRR, SDR, PDR, CDR, TRR 등)
	실적	-	-	-	-	-
	달성도	-	-	-	-	-
기술성숙도 (단위: 단계)	목표	-	-	-	-	4 (신규)	각 연차별 개발 일정을 감안하여 요소기술별 TRL 목표 선정	핵심요소기술의 TRL 단계 평균	연도별 세부과제 점검결과 반영
	실적	-	-	-	-	-
	달성도	-	-	-	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적 : 해당 없음

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

- (과학·기술적 측면) 우주 궤도 간 수송 서비스의 임무 실증으로 궤도수송선 우주 헤리티지 확보 및 국내 발사체의 수송 능력 향상을 통해 다양한 지구 저궤도 내 임무와 달, 화성 탐사 임무 등으로의 확장

- (경제·산업적 측면) 1회 발사 비용으로 다중 임무 수행을 통한 발사비용 측면에서 경제성 확보 및 지구저궤도 서비스 비즈니스 모델* 확장

* 다중위성 맞춤형 사출, 초저궤도 투입, 군집위성 위상 조정 사출 등으로 활용

- (사회적 측면) 국제 우주협력 범위 확대 및 우주화물 운송 거버넌스에 주도적 참여 기대

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지 : 해당 없음

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역 : 해당 없음

사업시행계획 수립	▪ 우주항공청 : 사업목표, 추진계획 등 사업기획안 수립 ▪ 사업추진위원회 : 사업시행계획 심의·의결
▼
수행기관 공모	▪ 우주항공청 : 수행기관 공모 ▪ 수행 기관 : 연구개발계획서 제출
▼
수행기관 선정	▪ 우주항공청(평가위원회) : 연구개발계획서 평가 ▪ 사업추진위원회 : 심의·기관 선정 확정
▼
협약 체결/연구비 지급	▪ 우주항공청 : 협약 체결 및 연구비 지급
▼
사업 수행	▪ 수행 기관 : 궤도수송선 비행모델 개발 및 실증
▼
진도 점검	▪ 우주항공청(평가위원회) : 연차점검·평가(필요시) ▪ 사업추진위원회 : 사업 주요사항 심의·조정 ▪ 수행 기관 : 연차보고서 제출 및 심의 결과 반영
▼
연구결과 평가	▪ 우주항공청(평가위원회) : 연구결과 평가 ▪ 사업추진위원회 : 사업 주요사항 심의·의결 및 결과 통보 ▪ 수행 기관 : 평가 보고서 제출 및 결과 반영
▼
연구비 정산 등 사후관리	▪ 우주항공청 : 연구비 사용실적 검토 및 정산 등 사후관리 수행 ▪ 수행 기관 : 최종보고서 제출 및 연구비 사용실적 보고 등

※ 우주항공청훈령 제40호 「우주항공청 연구개발사업 운영규정」 참조

7) 사업 집행절차

8) 중기재정계획 상 연도별 투자계획 및 추진경과

(단위: 백만원)

중기 재정계획	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2024~2028	-	-	-	-	-
2025~2029		-	3,000	12,975	17,175	3,450

9) 최근 3년간 동 사업에 대한 주요 외부지적사항 및 평가, 문제점 및 대책 : 해당 없음

10) 향후 추진방향 및 추진계획

- 궤도상 서비스 제공을 위한 궤도수송선 개발을 통해 민간 주도 우주경제 성장 기반 확보

- 기 개발·확보된 추진 시스템 기술을 활용(필요시 해외도입 포함)하여 임무다각화를 위한    최적 궤도수송선 개발 및 복합임무 실증

- 연구개발 로드맵

구분	‘26	‘27	‘28	‘29
임무·체계설계	임무·체계설계	기본·상세설계	설계 최적화(후속개발 대응)
추진·항전·분리 시스템	기본설계	최적화 적용	기능·성능시험
구조 시스템	기본 설계	상세설계	제작 및 평가
비행모델 개발			총조립·환경시험
우주실증		발사체 확보		발사 및 검증

※ 사업 추진 과정에서 로드맵은 변경될 수 있음

11) 해당사업에 대한 각종 사업평가의 결과 : 해당 없음

12) 해당사업에 대한 부처 자체평가의 결과 : 해당 없음

13) 부처 건의사항 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역 : 해당 없음

라. 기타 추가자료

(1) 참고1

(2) 참고2

참고1		궤도수송선 신규사업 설명자료

□ 사업 개요

○ (목적) 궤도상 서비스* 제공을 위한 궤도수송선** 개발을 통해 민간 주도 우주경제 성장 기반확보

* 위성 다중궤도 투입, 위성 재배치, 우주쓰레기 제거, 재급유, 우주탐사 등

** 궤도수송선(Orbital Transfer Vehicle, OTV): 우주 내 궤도 간 사람과 물자를 실어나르는 우주선

○ (목표) 지구저궤도 내 위성 다중궤도 사출 임무 실증을 목표로 궤도수송선 비행모델 개발* 및 우주실증**

* 기 개발·확보된 기술의 최적화 적용을 통한 비행용 시스템 개발

** 위성(큐브위성 2기 이상)의 지구저궤도 내 다중궤도 투입을 목표로 궤도 전이, 궤도 조정 등 복합임무 수행 및 기술성숙도(TRL) 7 달성

※ 정부 정책에 따라 실증 목표가 변경될 수 있음

○ (필요성) 국내 발사체*의 임무 확장 및 임무맞춤형 위성 다중궤도 사출로 발사체 1회 발사 비용으로 다회 발사 효과 실현(경제성 향상)

* (누리호, 운용중) 3단 엔진의 재점화가 불가하여 단일 궤도투입 임무 수행의 한계

○ (기간/예산) ’26~’29(총4년) / 총 467억원(국비 400억, 민간 67억)

※ 총사업비는 사업 추진 과정에서 조정될 수 있음

연도	’26년	’27년	’28년	’29년	합계
국비 예산(억원)	30	214	90	66	400

○ (수행주체) 산학연

□ 사업 내용

구분	주요 연구내용
궤도수송선 임무·체계설계	- 지구저궤도 내 우주실증을 위한 임무설계 - 궤도수송선 아키텍처 설계
비행모델 개발	- (추진·항전·분리 시스템) 기 개발·확보된 기술 활용 및 시스템 최적화 적용을 위한 설계, 기능·성능시험(필요시 해외 도입 검토) (구조 시스템) 고강도·고경량 구조 설계 및 제작, 평가
우주실증	- 위성(큐브위성 2기 이상)의 지구저궤도 내 다중궤도 투입 실증

○ (실증 시나리오(안)) 지구저궤도 내 큐브 위성 2기 이상의 다중궤도 사출 임무 실증

< 궤도수송선 아키텍처(예) >	< 위성 다중궤도 사출 임무 개념도(예) >

임무 시나리오(안)*	구분	조건
태양동기궤도(SSO)에 궤도수송선 투입	발사체 발사	투입 고도 : 500 km 투입 중량 : 300 kg
2. 위성 1 사출	위성 분리	추력 : 20N급
3. 고도 변경 기동 수행	추진시스템 점화 및 연소	속도증분 : 150 m/s
4. 위성 2 사출	위성 분리	투입 고도 : 300 km

* 검증 위성의 수, 다중 궤도 설정 등의 임무 시나리오를 구체화할 예정

○ 연구개발 로드맵

구분	‘26년	‘27년	‘28년	‘29년
임무·체계설계	임무·체계설계	기본·상세설계	설계 최적화(후속개발 대응)
추진·항전·분리 시스템	기본설계	최적화 적용	기능·성능시험
구조 시스템	기본설계	상세설계	제작 및 평가
비행모델 개발			총조립·환경시험
우주실증		발사체 확보		발사 및 검증

□ 대표성과 및 활용방안

○ (연구성과) 위성 다중궤도 사출 실증을 통해 궤도수송선 우주 헤리티지 확보 및 국내 발사체 임무 확장, 1회 발사로 다중 임무 수행을 통해 발사비용 측면에서 경제성 확보

○ (활용방안) 궤도수송선을 활용한 지구저궤도 서비스 비즈니스 모델* 확장

* 다중위성 맞춤형 사출, 초저궤도 투입, 군집위성 위상 조정 사출 등으로 활용

참고2		내역사업 세부 설명자료

1. 궤도수송선비행모델개발및실증(R&D)(ꞌ26.1.∼ꞌ29.12.)

□ 사업개요

사업기간	‘26.01 ~ ’29.12	총사업비	467억원(국비 : 400억원, 민간 : 67억원)
주관기관	우주항공청
담당자	한국형발사체프로그램 이수지 사무관(☏ 055-856-5154, 010-6762-8060)

□ 사업내용(지원내용)

ㅇ 지구저궤도 내 위성 다중궤도 사출 임무 실증을 목표로 궤도수송선 비행모델 개발 및 우주실증

※ 정부 정책에 따라 실증 목표가 변경될 수 있음

□ ’26년 예산 : 3,000백만원

ⓛ 궤도수송선 임무·체계설계 : 궤도수송선 임무·체계설계 기술 국산화 개발 800백만원

- (산출) 1개 x 1,067백만 x 9/12개월 = 800백만원

② 추진·항전·분리 시스템 설계 및 부품 발주 : 기 개발·확보된 기술의 활용 및 시스템 최적화 적용을 위한 시스템 설계 및 부품 발주 1,800백만원

- (산출) 1개 x 2,400백만 x 9/12개월 = 1,800백만원

③ 구조시스템 설계 : 고강도·경량 구조물 최적화 설계 및 개발 400백만원

- (산출) 1개 x 533백만 x 9/12개월 = 400백만원