사 업 명
(6) 국가정보자원관리원대구센터신축(정보화) (2042-500)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	11 일반회계	18 행정안전부	국가정보자원관리원		010	015
명칭	일반․지방행정	정부자원관리
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2000	2042	500
명칭	전자정부	국가정보자원관리원 대구센터신축	국가정보자원관리원 대구센터신축(정보화)
□ 사업 성격
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○		○	○
□ 사업 지원 형태 및 지원율
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
	소관부처	국가정보자원관리원 대구센터 클라우드서비스과
사업시행주체	국가정보자원관리원 대구센터

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
국가정보자원관리원 대구센터신축	22,786	9,058	9,058	22,599	22,599	13,541	149.5

□ 기능별(내역사업별) 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액
○ 기능별 분류(합계)	16,007	23,427	22,786	-	641	9,058	9,058	8,497	-	561	22,599
․전산장비 운영지원	-	-	-	-	-	7,678	7,678	7,260	-	418	7,647
․전산장비 유지관리	-	-	-	-	-	1,315	1,315	1,187	-	128	13,681
․부대경비	-	-	-	-	-	65	65	50	-	15	105
․총사업비외 전산장비 운영유지관리	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,166
․범정부통합전산환경구축	16,007	23,427	22,786	-	641	-	-	-	-	-	-

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (국가정보자원관리원대구센터신축(정보화)) 개별기관에서 운영되는 정보자원을 통합관리함으로써 운영관리 효율성 제고 및 보안 강화

- (전산장비 운영지원) 총사업비로 구축된 대구센터 전산장비에 대한 운영비

- (전산장비 유지관리) 총사업비로 구축된 대구센터 전산장비에 대한 유지관리비

- (총사업비 외 전산장비 운영유지관리) 총사업비 이외로 구축된 대구센터 전산장비에 대한 운영․유지관리비

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 : 전자정부법 제54조(정보자원 통합관리)

② 추진경위

- ’15.03. 제3정부통합전산센터 부지로 대구광역시 선정

- ’15.11. 대구정부통합전산센터 예비타당성 조사(조사결과 : B/C 1.13, AHP 0.508, 총사업비 4,609억원)

- ’16.05.17. 대구정부통합전산센터추진단 발족(대통령령 제27169호)

- ’22.04.30. 대구센터 신축 공사 준공

- ’23.06.13. 국가정보자원관리원 대구센터 출범

□ 주요내용

① 사업규모

- 총사업비 : 4,787억원

- 사업기간 : 2016년 ~ 2029년

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	52,634	34,469	16,007	9,058	22,599

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 행정안전부 국가정보자원관리원 대구센터

- 사업 수혜자 : 행정․공공기관

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 국가정보자원관리원대구센터신축(정보화) : (’26) 22,599백만원

① 총사업비전산장비 운영지원 : (’26) 7,647백

- (요구) 총사업비로 구축된 전산장비의 안정적 운영에 소요되는 인건비

- (산출) IT시스템 운영자(48명) × 159.3백만원(연간 인건비) ≒ 7,647백만원

② 총사업비전산장비 유지관리 : (’26) 13,681백

- (요구) 총사업비로 구축된 전산장비의 원활한 유지관리에 소요되는 예산

- (산출) H     W : 자산도입가(64,399백만원) × 유지보수요율(6%)     ≒ 3,864백만원

상용 SW : 자산도입가(11,221백만원) × 유지보수요율(15.81%) ≒ 1,774백만원

공개 SW : 기준단가(8,043백만원) × 유지보수요율(100.0%)    ≒ 8,043백만원

③ 총사업비부대경비 : (’26) 105백

- (요구) 총사업비로 구축된 전산장비 운영‧유지관리 사업의 조달 수수료

- (산출) 조달 수수료 : 105백만원

④ 총사업비 외 전산장비 운영유지관리 : (’26) 1,166백

- (요구) 총사업비 외로 구축된 전산장비의 안정적 운영과 원활한 유지관리에 소요되는 예산

- (산출) 유지관리비 : HW 236백만원 + 상용SW 47백만원 + 공개SW 872백만원

조달수수료 : 11백만원

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
인공지능 전자정부 서비스 이용률 (단위: %)	목표	-	-	-	18	19.8	전년도 실적의 10% 증가율 적용	‘최근 1년간 인공지능(AI)을 활용한 전자정부서비스를 이용한 적이 있다’라고 답한 국민 수 / 전체 표본 국민 수(만 16∼74세의 일반국민, 4,000명) × 100	국가승인통계
	실적	-	-	-	-	-
	달성도	-	-	-	-	-
전자정부 서비스 만족도 (단위: 점)	목표	-	87.9	87.9	87.9	-	해당없음	‘최근 1년 간 전자정부서비스에 대해 전반적으로 만족한다’는 문항에 대해 7점 리커트 척도 점수를 100점으로 환산하여 평균값 산출	국가승인통계
	실적	- (87.7)	86.3	89.4	-	-
	달성도	-	98.2	102.4	-	-
전자정부서비스 이용률(고령층) (단위: %)	목표	59.9	68.1	-	-	-	해당없음	‘최근 1년 간 전자정부서비스를 이용해 본 적이 있다’라고 답한 만60~74세 국민수/ {전체 표본(만16∼74세 일반국민 4,000명) 중 만60~74세 국민수} × 100	국가승인통계
	실적	77.2	73.4	-	-	-
	달성도	128.9	107.8	-	-	-
전자정부서비스 이용률 (단위: %)	목표	89.6	-	-	-	-	해당없음	‘최근 1년 간 전자정부서비스를 이용해본 적이 있다’라고 답한 국민수 / 전체 표본 국민 수(만16∼74세의 일반국민 4,000명) × 100	국가승인통계
	실적	92.2	90.6	-	-	-
	달성도	102.9	-	-	-	-
주요 공공서비스의 디지털 전환율 (단위: %)	목표	50	-	-	-	-	해당없음	‘개별 공공서비스의 디지털 전환율’ 전체의 평균값 - 개별 공공서비스의 디지털 전환율 = ‘해당 서비스의 공통지표와 서비스 유형별 지표에서의 총 획득점수’ ÷ ‘적용된 지표의 총 배점’	외부전문가를 통한 사용자(end user) 관점의 측정, 주요 공공서비스(10대 분야, 27개 소분류, 56개 서비스)
	실적	67.3	-	-	-	-
	달성도	134.6	-	-	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2022	o 대구센터 전산환경구축사업 총사업비 사업계획 적정성 재검토(‘22.1~’22.8) o 대구센터 신축공사 준공 완료(’22.4) 및 센터 임시운영 개시(‘22.5~) o 대구센터 전산환경구축사업 총사업비 조정완료 및 사업발주(’22.9~
2023	o 대구센터 전산환경 구축 사업 총사업비(업무망 분리) 조정(’23.7) o 대구센터 전산환경 구축 사업(1차) 완료(’23.8월) o 대구센터 전산환경 구축 사업(2차) 착수(’23.9월)
2024	o 대구센터 전산환경 구축 사업(3차) 계약 체결(’24.6월) o 대구센터 전산환경 구축 사업 총사업비(운영‧유지관리비) 조정(’24.7) o 대구센터 전산환경 구축 사업(2, 3차) 완료(’24.12) o 2025년도 대구센터 범정부 정보시스템 운영․유지관리 사업 계약 체결(’24.12.)
2025	o 2025년도 대구센터 범정부 정보시스템 운영․유지관리 사업 착수(’25.1.)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

ㅇ 행정·공공기관에서 운영되는 정보자원을 클라우드 데이터센터로 통합관리함으로써 정보자원의 운영 효율화 및 품질 향상을 기대하고 있으며, 체계적이고 안정적인 관리로 보안성을 극대화할 수 있을 것으로 예상됨

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지

□ 제3정부통합전산센터 신축사업 (KDI 공공투자관리센터, 2015.11)

- 경제성 분석결과(B/C*) : 1.13

* Cost Benefit Ratio : 비용의 현재가치에 대한 편익의 현재가치 비율

- 종합분석결과(AHP*) : 0.508

* Analytic Hierarchy Process : 다수 대안에 대한 다면적 평가기준을 통한 의사결정 지원 방법

- 지역경제 파급효과

구분	지역경제파급효과(억원)			취업유발효과(명)
	소계	생산 유발효과	부가가치 유발효과	소계	고용 유발효과	취업 유발효과
대구	4,058	2,810	1,248	5,775	2,832	2,943
전국	6,730	4,817	1,913	7,614	3,607	4,007

6) 총사업비 대상사업 여부 및 내역

□ 총사업비 정보

(단위: 억원)

연도	사업기간	2022까지 기투자액	2023	2024	2025	2026	2027이후 투자계획	계
사업비	2016~2029	3,351	340	155	90	214	637	4,787

□ 총사업비 변경내역(변경일자 및 규모, 변경사유)

(단위: 억원)

구분	변경연도	총사업비		사업기간		변경사유 및 내역(단위:백만원)
		당초	변경	착수연도	완료연도
최초		4,609		2016	2019
1차변경(협의1)	2016		4,347	2016	2018	- 예비비 감액 : △254 - 시설부대경비 요율조정 : △7.2
2차변경(협의2)	2018		4,540	2016	2020	- 총사업비 기간 조정 : ‘16~`18 → ‘16~`20 - 농지보전부담금 증액 : 11.24 - 원인행위 초과 사용분 설계비 증액 : 1.29
3차변경(협의3)	2018		4,347	2016	2020	- 생태계보전협력금 증액 : 0.48 - 총사업비 중 추진단운영비 제외 : △13.32
4차변경(자율)	2018		4,334	2016	2020	- 설계비 낙찰차액 감액 : △12.57
5차변경(자율)	2018		4,336	2016	2020	- 감리비 물가변동 반영 증액 : 1.74
6차변경(협의4)	2019		4,336	2016	2021	- 총사업비 기간 조정 : ‘16~`20 → ‘16~`21
7차변경(자율)	2019		4,291	2016	2021	- 공사비 낙찰차액 감액 : △44.20 - 공사비 감액에 따른 시설부대비 감액 : 0.44 - 자율조정한도 도급계약 낙찰가의 10%적용
8차변경(자율)	2019		4,311	2016	2021	- 낙찰탈락자 설계보상비 증액 : 20.25
9차변경(자율)	2020		4,311	2016	2021	- 공사비 낙찰차액 감액 : △0.11
10차변경(자율)	2020		4,310	2016	2021	- 공사비 낙찰차액 감액 : △0.74
11차변경(자율)	2020		4,308	2016	2021	- 공사비 낙찰차액 감액 : △2.2 - 공사비 감액에 따른 시설부대비 감액 : △0.02
12차변경(자율)	2020		4,308	2016	2021	- 공사비 낙찰차액 감액 : △0.1
13차변경(자율)	2020		4,417	2016	2021	- 공사비 물가변동(도급공사) 증액 : 82.36 - 공사비 물가변동(관급자재) 증액 : 19.28 - 감리비 물가변동 증액 : 1.25 - 흙막이 가시설계획 변경 증액 : 4.12 - 폐기물 처리비 증액 : 1.79 - 가시설계획 및 폐기물처리 비용 자율조정한도 지출
14차변경(자율)	2020		4,416	2016	2021	- 공사비 낙찰차액 감액 : △0.53
15차변경(협의5)	2020		4,476	2016	2022	- 총사업비 기간 조정 : ‘16~`21 → ‘16~`22 - 공사비(관급자재 등) 증액 : 60.12 - 계약증액분에 대한 자율조정한도 10%적용
16차변경(자율)	2020		4,468	2016	2022	- 공사비 낙찰차액 감액 : △8.69
17차변경(자율)	2021		4,467	2016	2022	- 공사비 낙찰차액 감액 : △0.26
18차변경(자율)	2021		4,467	2016	2022	- 공사비 낙찰차액 감액 : △0.32
19차변경(자율)	2021		4,475	2016	2022	- 공사비 물가변동 증액 : 6.81 - 흙막이 가시설계획 변경 증액 : 1.29 - 폐기물 처리비 증액 : △0.06 - 가시설계획 증 및 폐기물처리 감 자율조정한도 지출
20차변경(자율)	2021		4,458	2016	2022	- 정보화사업 낙찰차액 감액 : △17.47
21차변경(자율)	2021		4,449	2016	2022	- 정보화사업 낙찰차액 감액 : △8.25
22차변경(협의6)	2021		4,452	2016	2022	- 감리용역 연장에 따른 감리비 증액 : 2.68
23차변경(자율)	2021		4,502	2016	2022	- 공사비, 감리비 물가변동 반영 : 49.46
24차변경(협의7)	2022		4,640	2016	2028	- 구축비 감액 : △680.03 - 부대비 증액 : 18.31 - 운영, 유지관리비 신규반영 : 799.94 - 총사업비 기간 조정 : ‘16~`22 → ‘16~`28
25차변경(자율)	2022		4,652	2016	2028	- 공사비, 감리비 물가변동 반영 : 12.67
26차변경(자율)	2023		4,651	2016	2028	- 정보화사업 낙찰차액 감액 : △1.25
27차변경(자율)	2023		4,626	2016	2028	- 공사비 낙찰차액 감액 : △24.41 - 공사비 감액에 따른 시설부대비 감액 : △0.36
28차변경(자율)	2023		4,624	2016	2028	- 정보화사업 낙찰차액 감액 : △1.98
29차변경(자율)	2023		4,623	2016	2028	- 정보화사업 낙찰차액 감액 : △1.57
30차변경(자율)	2023		4,618	2016	2028	- 정보화사업 낙찰차액 감액 : △ 4.42 - 공사비 감액에 따른 시설부대비 감액 : △0.01
31차변경(자율)	2023		4,612	2016	2028	- 정보화사업 낙찰차액 감액 : △ 6.48 - 공사비 감액에 따른 시설부대비 감액 : △0.01
32차변경(자율)	2023		4,612	2016	2028	- 정보화사업 낙찰차액 감액 : △0.24
33차변경(협의8)	2023		4,653	2016	2029	- 총사업비 기간 조정 : ‘16~`28 → ‘16~`29 - 구축비 증액 : 41.22백 - 시설부대비 증액 : 0.25백
34차변경(자율)	2023		4,651	2016	2029	- 정보화사업 낙찰차액 감액 : △2.78
35차변경(자율)	2024		4,648	2016	2029	- 정보화사업 낙찰차액 감액 : △3.27 - 공사비 감액에 따른 시설부대비 감액 : △0.01
36차변경(협의9)	2024		4,796	2016	2029	- 시설부대비 증액 : 5.62 - 운영‧유지관리비 증액 : 142.69
37차변경(자율)	2025		4,796	2016	2029	- 운영‧유지관리비 감액 : △0.0023
39차변경(자율)	2025		4,787	2016	2029	- 구축비 감액(정산) : △9.42
2026년도 요구		214		2016	2029

7) 사업 집행절차

추진절차		시행주체		절차내용
① 정보화 사업 추진		행정안전부 (국가정보자원관리원)		사업계획 수립 ￫ 제안요청서 작성 ￫ 발주 의뢰
⇩
② 입찰 및 계약		조달청		사전공개 ￫ 협의 ￫ 입찰 ￫ 제안평가 ￫ 기술협상 ￫ 계약
⇩
③ 사업 수행		사업자		사업수행계획 수립 ￫ 착수 ￫ 사업 추진 ￫ 완료

8) 각종 평가 : 해당 없음

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			전년도 이월액	이․전용 등	예비비	예산 현액(B)	집행액 (C)	집행률 (C/A)	집행률 (C/B)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경(A)
2022	52,634	-	52,634				94,417	41,758	79.3	44.2	52,139	520
2023	34,469	-	34,469				85,294	76,648	222.4	89.9	7,761	885
2024	16,007	-	16,007				23,427	22,786	142.4	97.3	-	641
2025	9,058	-	9,058				9,058	6,990	77.2	77.2	-	-

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요 지적사항 및 시정요구사항

2022	- (전용) ’22년도 추진단운영비 6개월분 편성에 따른 부족분 발생 보존 12백 전용 - (이월) 클라우드 전산환경 구축 계약 체결 지연 등 (52,139백만원) 이월 - (불용) 계약체결 지연에 따른 정보화사업비, 운영비 집행잔액 등 520백만원 불용
2023	- (전용) ’23년도 공공요금(전기료) 상승에 따른 예산 부족분 1,314백 전용 - (이월) 대구센터에 입주예정인 행정·공공기관에서 소관 응용프로그램(Application)에 대한 클라우드 전환개발 사업비 확보가 지연됨에 따라 대구센터 본 사업 과업기간 조정 및 예산 이월 (7,761백만원) - (불용) 낙찰차액 및 운영비 집행잔액 등 886백만원 불용
2024	- (이용) ’24.11.26.~28. 대설ㆍ강풍ㆍ풍랑으로 인한 피해자(사유시설) 구호 복구비(재난지원금)로 지원금 341백만원 이용 - (불용) 낙찰차액 및 일반연구비 집행잔액 등 641백만원 불용
2025	해당없음

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음

□ 2025년 예비비 배정 세부내역 : 해당없음