사 업 명
(5) 국가정보자원관리원 공주센터 신축(정보화) (2036-508)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	11 일반회계	18 행정안전부	국가정보자원관리원		010	015
명칭	일반·지방행정	정부자원관리
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2000	2036	508
명칭	전자정부	국가정보자원관리원운영(정보화)	국가정보자원관리원공주센터신축(정보화)
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○			○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
국가정보자원관리원 공주센터 신축(정보화)	소관부처	국가정보자원관리원
정보자원관리과
사업시행주체	-

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경*(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
국가정보자원관리원 공주센터신축(정보화)	18,982	1,614	1,614	7,442	4,373	2,759	170.9

* 추경: 추경증감액을 포함한 최종 예산액을 기재

□ 기능별(내역사업별) 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액
○ 기능별 분류(합계)	25,150	24,583	18,982	5,593	8	1,614	7,207	6,952	-	255	4,373
․전산환경 구축 및 이전	25,150	24,583	18,982	5,593	8	486	6,079	6,000	-	79	-
․전산장비 운영 및 유지관리	-	-	-	-	-	1,128	1,128	952	-	176	4,373

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- 전쟁·재난·재해·대규모 장애 등 비상사태로 대전·광주센터 동시 기능 마비 시에도 행정업무의 연속성 확보 및 중요 전산자원의 안전한 보호 구현을 위한 정부 재해복구 전용 데이터센터 구축

- (전산환경 구축 및 이전) 공주센터 신축에 따른 통신망, 통합보안시스템, 운영통합시스템 등 전산환경 구축 및 대전·광주센터에서 운영 중인 온라인소산시스템 이전

- (전산장비 운영 및 유지보수) 전산환경 구축 및 이전 완료에 따른 HW 및 SW를 대상으로 전문 운영 및 유지관리

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 및 조항 적시 : 정보통신기반보호법 제5조, 재난 및 안전관리기본법 제4조

정보통신기반보호법 (법률 제20068호, ‘24.1.23. 일부개정)

제5조(주요정보통신기반시설보호대책의 수립 등) ①주요정보통신기반시설을 관리하는 기관(이하 "관리기관"이라 한다)의 장은 제9조제1항 또는 제2항에 따른 취약점 분석·평가의 결과에 따라 소관 주요정보통신기반시설 및 관리 정보를 안전하게 보호하기 위한 예방, 백업, 복구 등 물리적·기술적 대책을 포함한 관리대책(이하 "주요정보통신기반시설보호대책"이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.

재난 및 안전관리 기본법(법률 제20030호, ‘24.1.16. 일부개정)

제4조(국가 등의 책무) ① 국가와 지방자치단체는 재난이나 그 밖의 각종 사고로부터 국민의 생명ㆍ신체 및 재산을 보호할 책무를 지고, 재난이나 그 밖의 각종 사고를 예방하고 피해를 줄이기 위하여 노력하여야 하며, 발생한 피해를 신속히 대응ㆍ복구하여 일상으로 회복할 수 있도록 지원하기 위한 계획을 수립ㆍ시행하여야 한다.

② 추진경위

▪ ’08.07. : ‘정보보호 중기 종합계획’ 국무회의 보고

▪ ’09.12. ~ ’10.06. : 정부전산백업센터 기본계획 수립 및 타당성 조사

▪ ’10.07. ~ ’13.02. : 정부전산백업센터 타당성 재조사(1‧2차)

▪ ’16.10. ~ ’18.03. : 공주센터 건축공사 기본설계 및 실시설계

▪ ’19.04. ~ ’23.05. : 공주센터 1차 건축공사 완료

▪ ’23.04. ~ ’23.08. : 공주센터 전산환경 구축·이전 ISMP 수립 완료

▪ ’24.03. ~ ’24.10. : 전산실 기반환경 구축공사 완료

▪ ’24.11. ~ ‘25.09. : 전산환경 구축 추진 중

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비(해당되는 경우에만 기재) : 52,697백만원

- 사업기간 : 2024년 ~ 2030년

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	-	25,150	1,614	4,373

- 기타: 전산동(지하(터널)3층 9,141㎡), 관리동(지상3층, 5,875㎡) 및 경비동(지상1층, 106㎡)

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 행정안전부 국가정보자원관리원

- 사업 수혜자 : 행정·공공기관, 국민

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

□ 국가정보자원관리원공주센터신축(정보화) : (2026 예산) 4,373백만원

○ 전산장비 운영 및 유지관리 : (2026 예산) 4,373백만원

- (산출) 전산장비 운영 3,794백, 전산장비 유지관리 557백, 조달수수료 22백

가. 전산장비 운영 : (2026 예산) 3,794백만원

- (산출) 12,646천원 x 25명 x 12개월

구분		산출근거			합계(원)
		인원	월평균임금(원)	근무월
직접 인건비 (①)	IT PM	1	9,145,473	12	109,745,670
	IT시스템운용자	7	10,154,626	12	852,988,580
	IT지원기술자	17	5,058,021	12	1,031,836,280
	소 계	25			1,994,570,530
제경비(②)		직접인건비×44%			879,685,390
기술료(③)		(직접인건비+제경비)×20%			574,851,180
부가세(④)		(직접인건비+제경비+기술료)×10%			344,910,712
(A)합계(①+②+③+④)					3,794,017,830

※ ’25년 적용 SW기술자 평균임금(‘24.12.3.) 적용

나. 전산장비 유지관리 : (2026 예산) 557백만원

- (산출) HW1 : 도입가(19,245백) x 유지보수요율(7%) x 3개월/12개월 ≒ 337백만원

HW2 : 도입가(1,438백) x 유지보수요율(7%) x 12개월/12개월 ≒ 101백만원

SW : 도입가(3,404백) x 유지보수요율(14%) x 3개월/12개월 ≒ 119백만원

(단위 : 천원)
도입구분	장비 구분	수량 (식)	도입가(①)	요율 (②)	‘26년 유지관리 개월수(③)	‘26년 유지관리비 (①x②x(③/12개월))
(A)합계						556,603
전산환경 구축	HW1	440	19,245,200	7%	3개월*	336,791
	SW	128	3,403,524	14%	3개월*	119,123
건축 신축 공사	HW2	75	1,438,413	7%	12개월	100,689

* 전산환경 구축 완료(‘25.9월) 후 하자보수(1년, ~’26.9월) 제외 3개월분(‘26.10월~12월) 산정

다. 조달수수료 : (2026 예산) 22백만원

- (산출) 4,351백(3,794백(운영비)+557백(유지관리비)), 내자구매, 제안서평가대행(+10%) = 22백만원

※ 조달수수료 고시(조달청고시 제2022-17호) 및 조달청 나라장터 수수료 계산 기준

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
인공지능 전자정부 서비스 이용률 (단위: %)	목표	-	-	-	18	19.8	전년도 실적의 10% 증가율 적용	‘최근 1년간 인공지능(AI)을 활용한 전자정부서비스를 이용한 적이 있다’라고 답한 국민 수 / 전체 표본 국민 수(만 16∼74세의 일반국민, 4,000명) × 100	국가승인통계
	실적	-	-	-	-	-
	달성도	-	-	-	-	-
전자정부 서비스 만족도 (단위: 점)	목표	-	87.9	87.9	87.9	-	해당없음	‘최근 1년 간 전자정부서비스에 대해 전반적으로 만족한다’는 문항에 대해 7점 리커트 척도 점수를 100점으로 환산하여 평균값 산출	국가승인통계
	실적	- (87.7)	86.3	89.4	-	-
	달성도	-	98.2	102.4	-	-
전자정부서비스 이용률(고령층) (단위: %)	목표	59.9	68.1	-	-	-	해당없음	‘최근 1년 간 전자정부서비스를 이용해 본 적이 있다’라고 답한 만60~74세 국민수/ {전체 표본(만16∼74세 일반국민 4,000명) 중 만60~74세 국민수} × 100	국가승인통계
	실적	77.2	73.4	-	-	-
	달성도	128.9	107.8	-	-	-
전자정부서비스 이용률 (단위: %)	목표	89.6	-	-	-	-	해당없음	‘최근 1년 간 전자정부서비스를 이용해본 적이 있다’라고 답한 국민수 / 전체 표본 국민 수(만16∼74세의 일반국민 4,000명) × 100	국가승인통계
	실적	92.2	90.6	-	-	-
	달성도	102.9	-	-	-	-
주요 공공서비스의 디지털 전환율 (단위: %)	목표	50	-	-	-	-	해당없음	‘개별 공공서비스의 디지털 전환율’ 전체의 평균값 - 개별 공공서비스의 디지털 전환율 = ‘해당 서비스의 공통지표와 서비스 유형별 지표에서의 총 획득점수’ ÷ ‘적용된 지표의 총 배점’	외부전문가를 통한 사용자(end user) 관점의 측정, 주요 공공서비스(10대 분야, 27개 소분류, 56개 서비스)
	실적	67.3	-	-	-	-
	달성도	134.6	-	-	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2023	○ 공주센터 1차 건축공사 완료(’23.5. 준공) ○ 공주센터 전산환경 구축·이전 ISMP 수립 완료(’23.4.~8.)
2024	○ 공주센터 전산환경 구축 사업 추진(‘24.10. ~ ’25.9.)
2025	○ 공주센터 정보시스템 운영·유지관리 사업 추진(‘25.10. ~)

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과

ㅇ 재난·재해 및 장애 대비 국가 중요 전산자료의 안전한 보호와 중단 없는 디지털 행정서비스 제공이 가능한 재해복구 전문센터 본격 운영

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지

□ 예비타당성 조사 여부 : 생략

- 국회에서 기본조사설계비 10억원 반영되어 예비타당성 조사 생략

□ 타당성 재조사(1차) : 정부전산백업센터 건립사업 (KDI 공공투자관리센터, 2011.5.)

- 경제성 분석결과(B/C*) : 2.55

* Cost Benefit Ratio : 비용의 현재가치에 대한 편익의 현재가치 비율

- 종합분석결과(AHP*) : 0.675

* Analytic Hierarchy Process : 다수 대안에 대한 다면적 평가기준을 통한 의사결정 지원 방법

- 지역경제 파급효과

□ 타당성 재조사(2차) : 정부전산백업센터 신축사업 (KDI 공공투자관리센터, 2013.2.)

- 경제성 분석결과(B/C*) : 2.75

* Cost Benefit Ratio : 비용의 현재가치에 대한 편익의 현재가치 비율

- 종합분석결과(AHP*) : 0.747

* Analytic Hierarchy Process : 다수 대안에 대한 다면적 평가기준을 통한 의사결정 지원 방법

- 지역경제 파급효과

생산유발효과(억원)	부가가치유발효과(억원)	고용유발효과(명)	취업유발효과(명)
2,572.07	1,090.98	1,735.43	1,970.84

6) 총사업비 대상사업 정보

□ 총사업비 정보

(단위: 억원)

연도	사업기간	2022까지 기투자액	2023	2024	2025	2026	2027이후 투자계획	계
사업비	‘24 ~ ’30	-	-	252	16	44	215	527

□ 총사업비 변경내역(변경일자 및 규모, 변경사유)

(단위: 억원)

구분	변경연도	총사업비		사업기간		변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최초	2022	816		2012*	2029	공주센터 신축(정보화) 최초 등록
(1)차변경(협의)	2024	816	821	2012	2030	ISMP 결과 통신 인프라 추가
(2)차변경(자율)	2024	821	816	2012	2030	낙찰차액 감액 및 시설부대비 감액
(3)차변경(협의)	2025	816	527	2012	2030	운영·유지관리 현행화 반영
2026년도 요구		44		2012	2030

* 공주센터 신축 총사업비는 건축분야(국유재산관리기금, ‘12~’24년)와 정보화분야(일반회계, ‘24~’30년)로 되어 있으며 본 세부사업은 정보화분야에 한하여 작성함

7) 사업 집행절차

추진절차		시행주체		절차내용
① 정보화 사업 추진		행정안전부 (국가정보자원관리원)		사업계획 수립 ￫ 제안요청서 작성 ￫ 발주 의뢰
⇩
② 입찰 및 계약		조달청		사전공개 ￫ 구매협의 ￫ 입찰 ￫ 기술협상 ￫ 계약
⇩
③ 구축 사업 수행		사업자		사업수행계획수립 ￫ 구축 ￫ 시스템이전 ￫ 준공

8) 각종 평가

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적

- (예결위, ‘25예산) 사업이 추가적으로 지연되지 않도록 집행관리를 철저히 할 필요가 있음

- (행안위, ’25예산) 2025년 9월까지 정보화사업을 완료하고 2025년 10월부터 공주센터를
본격적으로 운영한다는 계획에 차질이 없도록 사업관리를 철저히 할 필요가 있어 보임

- (행안위, ’26예산) 국가 재해복구 데이터센터인 공주센터 사업 취지에 부합하도록 사업명칭 변경 및 재해복구시스템 구축 관련 사업 예산편성을 사업의 내용과 취지에 맞게 동 세부사업으로 일원화하여 편성함으로써 예산 규모의 적정성, 사업추진방식의 타당성 등을 명확히 파악할 수 있도록 개선할 필요가 있음

- (예정처, ‘24결산) 추가 지연이 없도록 사업관리 철저하게 할 필요가 있음

2) 대외공개 평가: 해당 없음

3) 자체평가

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산현액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	25,150	-	25,150	24,583	18,982	77.2	5,593	8
2025	1,614	-	1,614	7,207	6,952	96.5	-	255

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요사항

2022	해당없음
2023	해당없음
2024	- (이용) 567백만원 · ‘24.11월 대설피해 재난지원금 부족재원 마련을 위해 공주센터 전산환경 구축비(공사비, 감리비, 자산취득비)를 ’재난대책비‘로 이용 - (전용) 1,343백만원 · 총사업비 조정결과에 따라 ‘24년 확보된 재해복구 이전비 감액분을 전산환경 구축 및 감리비 부족분으로 전용 - (이월) 5,593백만원 · 행정전산망 장애(’23.11)에 대한 후속 대책 반영 및 기재부 총사업비 조정(‘24.7) 등으로 사업 기간(’24.11~‘25.9) 순연되었고, ’24.11.26. 계약체결 후 용역 추진 중으로 과업 기간 등을 고려하여 이월 - (불용) 8백만원 · 전산환경 구축 및 이전 사업의 낙찰차액 등 잔액
2025	해당없음

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음