사 업 명
(21) 과학문화센터 건립 (2034-406)
□ 사업 코드 정보
구분	회계	소관	실국(기관)	계정	분야	부문
코드	행정중심복합도시건설특별회계	행정중심복합도시건설청	시설사업국		140	142
명칭	국토및지역개발	지역및도시
구분	프로그램	단위사업	세부사업
코드	2000	2034	406
명칭	행정중심복합도시건설	지방행정시설 건립	과학문화센터 건립
□ 사업 성격 (공통요구자료 Ⅱ-1 작성유의사항 4. 참조, 해당하는 사항에 “○” 표시)
신규	계속	완료	예비타당성 실시여부	총사업비 관리대상	총액계상 예산사업	사업소관 변경정보
2025예산 시 소관
	○			○
□ 사업 지원 형태 및 지원율 (최소한 한 개는 반드시 선택하시오. 해당사항에 O 표시)
직접	출자	출연	보조	융자	국고보조율(%)	융자율 (%)
○
□ 사업 소관부처 및 시행주체
사업명	구분
	소관부처	실·국·과(팀)명
사업시행주체	기관명
과학문화 센터 건립	소관부처	시설사업국
공공시설건축과
사업시행주체	행정중심복합도시건설청

가. 예산 총괄표

(단위: 백만원, %)

사업명	2024년 결산	2025년 예산		2026년 예산		증감 (B-A)
		본예산	추경*(A)	요구안	본예산(B)		(B-A)/A
과학문화센터 건립	654	1,285	1,285	1,347	1,347	62	4.8

* 추경: 추경증감액을 포함한 최종 예산액을 기재

□ 기능별(내역사업별) 예산 내역

(단위: 백만원)

	2024					2025					2026 예산
	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액	예산액 (추경)	예산 현액	집행액	이월액	불용액
○ 기능별 분류(합계)	649	714	654	60	-	1,285	1,345	1,281	-	64	1,347
․과학문화센터 건립	649	714	654	60	-	1,285	1,345	1,281	-	64	1,347

나. 사업설명자료

1) 사업목적·내용

- (과학문화센터 건립) 동 사업은 국가건설 계획도시인 행복도시 내 스마트시티 국가시범도시(5-1생활권)에 학생·학부모를 포함한 시민들에게 과학문화를 체험·향유할 수 있는 공간을 제공하기 위한 스마트 과학문화시설인 ‘과학문화센터’를 건립하는 사업

2) 사업개요

□ 사업근거 및 추진경위

① 법령상 근거 조항 적시

- “행복도시법” 제39조 건설청장은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

14. 행정중심복합도시의 원활한 기능 수행을 위하여 필요한 시설로서 대통령령으로 정하는 시설의 설치 및 관리

- “행복도시법” 제45조 ② 회계의 세출은 다음 각 호와 같다

11. 그 밖에 행정중심복합도시 건설과 관련하여 대통령령으로 정하는 항목에의 지출

- “행복도시법 시행령” 제24조 법 제39조제14호에서 "대통령령이 정하는 시설"이라 함은 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호의 규정에 의한 기반시설로서 관계 법령에 의하여 건설청장이 설치 또는 관리함에 있어서 제한을 받지 아니하는 시설을 말한다.

- “행복도시법 시행령” 제26조 ① 법 제45조제2항제1호에서 “대통령령이 정하는 공공시설”이라 함은 다음 각 호의 시설을 말한다.

2. 법 제39조의 규정에 의하여 건설청장이 시설을 설치 및 관리하는 경우 그 설치 및 관리에 소요되는 비용

- “국토계획법” 제2조 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

6. 기반시설이란 다음 각 목의 시설로서 대통령령으로 정하는 시설을 말한다.

라. 학교·운동장·공공청사·문화시설 및 공공필요성이 인정되는 체육시설 등 공공· 문화체육시설

- “청소년활동 진흥법” 제10조 청소년활동시설의 종류는 다음 각 호와 같다.

1. 청소년수련시설

라. 청소년특화시설: 청소년의 직업체험, 문화예술, 과학정보, 환경 등 특정 목적의 청소년활동을 전문적으로 실시할 수 있는 시설과 설비를 갖춘 수련시설

- “과학ㆍ수학ㆍ정보 교육 진흥법” 제5조 ① 국가와 지방자치단체는 과학ㆍ수학ㆍ정보 교육을 진흥하기 위하여 이 법이나 그 밖의 관계 법령에서 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항에 관한 시책을 마련하여야 한다.

6. 과학관, 수학관 등 과학ㆍ수학ㆍ정보 교육 관련 전시ㆍ체험시설의 설치ㆍ운영

② 추진경위

-  ́18. 4 : 행복도시 교육시설 설치계획연구*(행복청·교육청)

* 행복도시는 국가주도의 계획도시로 국가가 직접 건설하는 특수성을 고려하여 도시 정주여건 중 교육여건 조성에 국가재정 지원이 필요(5-1생활권에 과학문화센터 제안)

-  ́19. 4 : 행정중심복합도시 교육특화 업무협약(행복청장-교육감)

-  ́19. 5 : 행복도시 건설사업 개발계획(49차) 반영

-  ́22.12 : 과학문화센터 건립 2023년 예산(1억원) 확정

-  ́23. 2. : 과학문화센터 건립계획(안) 마련을 위한 교육청 협의

-  ́23. 4. : 과학문화센터 건립 공공건축 사업계획 사전검토

-  ́23. 6. : 과학문화센터 건립 공공건축심의 완료

-  ́23. 7. : 과학문화센터 건립 건축기획용역 착수

-  ́24. 3. : 과학문화센터 건립 건축기획용역 완료 및 설계공모 공고

-  ́24. 6. : 과학문화센터 건립 설계공모 당선작 선정 및 기본 및 실시설계용역 착수

-  ́25. 9. : 중간설계 적정성 검토 및 총사업비 협의 완료

-  ́25. 12. : 실시설계 추진 중

□  주요내용

① 사업규모

- 총사업비 :  511억원

- 사업기간 :  2023년 ~ 2029년

- 최근 5년 간 투입된 사업비(예산액기준, 추경편성한 연도에는 추경포함)

연도	2022	2023	2024	2025	2026
사업비	-	100	649	1,285	1,347

- 기타 : 대지면적 9,444㎡, 연면적 12,000㎡

② 사업추진체계

- 사업시행방법 : 직접수행

- 사업시행주체 : 행정중심복합도시건설청

- 사업 수혜자 : 국민

- 보조, 융자, 출연, 출자 등의 경우 보조․융자 등 지원 비율 및 법적근거 : 해당없음

3) 2026년도 예산 산출 근거

① 과학문화센터 건립

- (2025년 본예산) 1,285백만원 → (2026년 예산) 1,347백만원, +4.8%

- (요구) 본격적인 건설공사 추진을 위한 재원소요 반영 예산 요구

- (산출) 공사비 1,007백만원(잔사업비의 4.8%)

감리비 300백만원(잔사업비의 12.5%)

시설부대비 40백만원(잔사업비의 83.3%)

ㅇ 2025년도 예산 및 2026년도 예산 산출 세부내역 비교

2025년 본예산		2026년 예산
예산	산출내역	예산	산출내역
1,285 백만원	◦실시설계비: 1,265백만원(잔사업비 100%) ◦시설부대비: 20백만원(잔사업의 30%)	1,347 백만원	◦공사비: 1,007백만원(잔사업비 4.8%) ◦감리비: 300백만원(잔사업비 12.5%) ◦시설부대비: 40백만원(잔사업비 83.3%)

4) 사업효과

□ 사업영향, 산출물 성과지표 등

① 2022~2026년도 성과계획서 상 성과지표 및 최근 5년간 성과 달성도

성과지표	구분	2022	2023	2024	2025	2026	2026 목표치 산출근거	측정산식 (또는 측정방법)	자료수집방법 (또는 자료출처)
종합공정률 (단위: %)	목표	-	-	-	신규	61.5	‘24년 실적을 기준으로 최근 3개년 평균 상승률 반영	(개발완료면적 / 개발계획면적) X 100(%)	자체자료
	실적	-	-	-	-	-
	달성도	-	-	-	-	-

② 성과지표 이외의 연도별 사업추진 경과 및 실적

2023	기본계획(안) 수립 및 건축기획용역
2024	설계공모 및 당선작 선정, 기본 및 실시설계 착수
2025	기본설계 총괄자문단 소위원회 자문 및 중간설계 조달청 중간설계 적정성 검토

③ 향후(2026년도 이후) 기대효과 : 인구분포에서 유아·초등학생층이 두터우나 과학 관련 시설이 전무(광역시·도 평균 8.3개 보유)한 행복도시에 과학 문화공간 및 과학 교육 서비스 공간 제공

* ( ́25.10 기준 평균연령) 행복도시: 36.6세, 전국: 45.7세

5) 타당성조사 및 예비타당성조사 시행여부 및 결과 요지

□ 예비타당성조사 대상에 해당되지 않음(국비 재정지원 300억 미만)

6) 총사업비 대상사업 정보

□ 총사업비 정보

(단위: 억원)

연도	사업기간	2022까지 기투자액	2023	2024	2025	2026	2027이후 투자계획	계
사업비	2023~2029	-	0.4	6.5	12.8	13	222.8	255.5

□ 총사업비 변경내역(변경일자 및 규모, 변경사유)

(단위: 억원)

구분	변경연도	총사업비		사업기간		변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도
최초	2023	492		2023	2027	신규사업
(1)차 변경	2024		497	2023	2027	지가상승분 반영
(2)차 변경	2024		497	2023	2027	설계비 낙찰차액 조정
(3)차 변경	2025		511	2023	2029	중간설계 적정성검토 결과 반영
2026년도 요구		511		2023	2029

7) 사업 집행절차

추진절차		시행주체		절차내용
① 기본계획 수립		행복청		건립사업 기본계획 수립
⇩
② 설계공모 실시		행복청		설계안 마련을 위한 설계공모 실시 및 당선작 선정
⇩
③ 기본, 실시설계		행복청		기본 및 설계용역 추진
⇩
④ 공사발주, 착공		행복청		건립공사 착공 및 공사 추진
⇩
⑤ 준공 및 이관		행복청		준공에 따른 시설물 이관 및 운영

8) 각종 평가

1) 국회(예결위, 상임위, 예정처, 국정감사 포함) 지적

- 과학문화센터 건립 사업이 추진 절차를 누락하여 사업이 지연된 문제가 있으므로       추가적인 지연이 되지 않도록 사업관리 철저(2023년도 결산, 예정처)

2) 대외공개 평가

3) 자체평가

다. 최근 4년간 결산내역

1) 결산표

□ 부처 결산내역

(단위: 백만원, %)

연도	예산액			예산현액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A)	다음연도 이월액	불용액
	본예산	추경 증감액	추경
2022	-	-	-	-	-	-	-	-
2023	100	-	100	100	35	35.3	65	-
2024	649	-	649	714	654	91.6	60	-
2025	1,285	-	1,285	1,345	1,281	95.2	-	64

2) 주요 결산사항

□ 2022~2025년 결산 주요사항

2023	- (이월) 65백만원: 공정일정 순연에 따른 기본조사비(65백만원) 이월
2024	- (이월) 60백만원: 공정일정 순연에 따른 시설부대비(60백만원) 이월
2025	- (불용) 64백만원: 설계비 등 집행잔액 불용

□ 2025년 이․전용 등 세부내역 : 해당없음